문서번호	기전설비과-6024
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
성기학		10/05 김상동
협조
	치수과장		최연호

- 여의샛강 생태공원 조명시설 개선 전기공사 -

실정 보고(3회) 관련 자재 구매 계획 보고

2021. 10

한강사업본부

기전설비과

여의샛강 생태공원 조명시설 개선 전기공사

실정 보고(3회) 관련 자재 구매 계획 보고

여의샛강 생태공원 조명시설 개선 전기공사 시행중 공원등이 없어 야간 보행안전 사유로 신설 요청 민원이 자주 발생하는 산책로 구간에 공원등 추가 신설이 필요한 바, 이에 필요한 공사 자재를 추가 구매하고자 함.

▣ 관련 근거

○ 공사 실정보고(2회) 검토 회신 ------ 기전설비과-3911(2021.07.03)

○ 실정보고서(3회) 제출 ---- 서울시설공단 공사감독3처-9561(2021.09.29)

▣ 보고 내용

○ 공원등이 없는 산책로에 야간보행 안전 이유로 신설 민원 잦은 구간

▸샛강주차장(여의동주민센터 앞) 주변 산책로 공원등 12등 신설

▣ 공사비 집행 현황                                   (단위 : 천원)

구 분	당초 계약 금액	신설 증가 금액 (추정)	비 고
공 사 비	190,394	17,000	낙찰차액 25,270
관급자재	98,760	14,000	공원등주 및 등기구
소 계	289,154	31,000

▣ 자재 구매

○ 구매물품 : 8m 철재가로등주 12본, LED 100W 등기구 12개

○ 구매방법 : 조달구매(제3자단가 계약 물품)

▣ 소요 예산

○ 구매비용 : 14,000천원(추정)

○ 예산조치 : 본 공사 집행 잔액 활용.  끝.