“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰(은평메디텍고등학교 외 3개소 음수대 배관 설치공사)

1. 우리 사업소에서 시행중인 「은평메디텍고등학교 외 3개소 음수대 배관 설치공사」에 대하여 자체 설계변경 심의회 결과에 따라 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 은평메디텍고등학교 외 3개소 음수대 배관 설치공사

나. 공사현황 : 음수대 내부배관 설치 D=15mm, L=112m

다 공사기간 : 2021. 7. 26. ~ 2021. 10. 8.

라. 계약금액 변경내역                                                    (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비고(증․감)
도급비	*********	*********	***********

마. 설계변경사유 : 신규 공사현장 1개소 추가에 따른 계약물량 증․감

바. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(음수대설치사업)

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 심의 의결서 1부.

3. 설계변경 수량산출서 및 내역서 1부.

4. 변경합의서 1부.

5. 공사설명서 1부.

6. 공사시방서 1부.  끝. 【증추산 : 추산번호 18617번, 2021. 10. 5.)】

주무관	박성열		주무관	김상진		주무관	구자람		시설안전팀장	권영안
시설관리과장	10/05 이준호
협조자
시행	시설관리과-17003	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 시설관리과 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3700	/전송	3146-3739	/	tjdduf9498@seoul.go.kr	/	부분공개(7)