문서번호	도로보수과-8879
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
황태선	김순수	10/06 고영준

『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

작업(5차) 완료 보고

2021.  10.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

작업(5차) 완료 보고

우리사업소에서 시행중인「2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)」와 관련 5차 작업지시분에 대한 공사가 완료되어 이에 검토 보고 드림

▢ 사업개요

∘ 공 사 명: 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)-북부

∘ 공사개요

- 도로부속물 세척 : 8,500㎡

- 과속방지턱 도색 : 1,222㎡

- 옹 벽 보 수        :    35㎡

∘ 총공사비: *********

****************

∘ 도 급 자:*******************

▢ 5차 작업완료 내용

∘ 작업기간: 2021. 08. 30. ~ 10. 08.

∘ 작업구간: 종로구 자하문로 외 10개 노선(화랑로, 노원로, 지봉로, 자하문로 등)

공종	단위	정비물량		증·감
		작업지시	작업완료
도로부속물 세척	㎡	4,716	4,716	-
도로반사경 설치	개	2	2	-
갈매기표지 설치	개	1	3	2

∘ 예산집행현황

(단위: 천원)

구분	계약금액	기 작업완료 (1~4차)	5차 작업완료	잔 액	비 고
도급비	309,726	206,283	75,900	27,543
관급비	20,000	-	-	20,000
이전비	22,204	11,916	-	10,288
총공사비	351,930	218,199	75,900	57,831

▢ 조치계획

∘ 『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』에 시공물량을 반영하여 실정산하고자 함.

붙임   1. 작업완료 사진대지(별도) 1부.

2. 작업완료 보고서 1부.  끝.