문서번호	기전과-4965
결재일자	2021. 10. 7.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		10/07 서승완
협조

『서울제물포터널』

원인자부담공사 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

강서도로사업소

(기전과)

『서울제물포터널』

원인자부담공사 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    실정보고가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

방재시설부-12743(2021.10.05.)호

TR-감-21047(2021.10.01.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 서울제물포터널 민간투자사업(2공구) 교통안전시설물 이설공사

원 인 자 : 도시기반시설본부

공사기간 : 2016.05.04. ~ 2021. 06. 30.

공사장소 : 영등포구 여의도동 서울교교차로

공사개요 : 단계별 교통신호지주 이설

관련업체 및 주요 설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	주요설치내용
신호기	㈜트래픽스	㈜트래픽스	㈜다해산업개발	· 단계별 교통안전시설 이설

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용

- 서울특별시경찰청 최종규제 하달 및 승인조건에 따른 설계변경

- 교차로 내 횡단보도 변경 등에 따른 공사기간 연장

설계변경내용

구 분	변경내용		비 고
	변경전	변경후
지주	- 이설 1본	- 교체 9본	디자인지주로 교체
신호등	- 이설 8조	- 교체 9조	노후 신호등 교체
음향신호기	- 신설 2대	- 신설 8대

구 분	변경전	변경후	비 고
공사기간	2016. 05. 04 ∼ 2021. 06. 30.	2016. 05. 04 ∼ 2021. 10. 10.	102일 증

공사기간 변경내용

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 승인통보

붙임 1. 승인요청 및 감리사 검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계도면(변경전후) 1부.  끝.