문서번호	기전과-11429
결재일자	2021. 10. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이규하		代이규하	10/07 代박신범
협조

『2020년 횡단보도 확충사업(압구정역 사거리)』

교통신호기 공사 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.10.07.(목)

동부도로사업소

(기전과)

『2020년 횡단보도 확충사업(압구정역 사거리)』

교통신호기 공사 설계변경 검토 보고

「2020년 횡단보도 확충사업(압구정역 사거리)」와 관련 감리업체로부터 제출된 설계변경 요청사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

□ 2020년 횡단보도 확충사업(압구정역 사거리) 설계변경서 제출

○ 대영유비텍(주) 대영GE21A-10-10호(2021.10.07.)

2		계약현황

□ 계 약 명 : 2020년 횡단보도 확충사업(압구정역 사거리)

□ 계약기간 : 2020.11.2.(화)~2021.12.28.(화)

□ 계약업체 : **************

□ 계약금액 : ****************************

□ 감리업체 : ***************

3		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 현장여건 반영에 따른 물량변경 및 보험료 등 제경비 정산

□ 주요 물량 변경내역

연번	품 명	규 격	구분	단위	수량			금액(원)
					당초	변경	증,감	당초	변경	증감
1	교통신호등지주 신설	관급,Ø125㎜×6M	신설	본	2	3	1	467,754	701,631	233,877
2	보행,보조신호등용 보호금구	용융아연도금,Ø120㎜×460㎜	신설	조	1	-	-1	30,710	-	-30,710
3	디자인지주 보행용 보호금구	AL주물(Ø80*4.5t*210L)/숫자형	신설	조	3	4	1	263,235	350,980	87,745
4	지주기초 및 앙카	Ø125㎜(0.8m×0.6m×0.8m)	신설	조	3	-	-3	941,778	-	-941,778
5	지주기초 및 앙카(기성품 사용)	Ø125㎜(0.8m×0.6m×0.8m)	신설	조	-	4	4	-	972,036	972,036
6	신호케이블	F-CVV,1.5SQ/5C,지중2선	신설	m	-	14	14	-	209,048	209,048
7	신호케이블	F-CVV,1.5SQ/5C,지중4선	신설	m	48	-	-48	1,366,128	-	-1,366,128
8	신호케이블	F-CVV,1.5SQ/5C,가공1선	신설	m	69	63	-6	895,689	817,803	-77,886
9	신호케이블	F-CVV,1.5SQ/5C,가공2선	신설	m	8	106	98	183,432	2,430,474	2,247,042
10	신호케이블	F-CVV,1.5SQ/5C,가공3선	신설	m	29	-	-29	953,404	-	-953,404
11	신호케이블	F-CVV,1.5SQ/5C,가공4선	신설	m	28	-	-28	1,199,044	-	-1,199,044
12	조가선	와이어로프(6mm)	신설	m	134	169	35	349,874	441,259	91,385
13	전선관 배관	PE Ø54㎜, 1열	신설	m	6	-	-6	85,566	-	-85,566
14	소형고압블럭 굴착배관	기계 80%+ 인력 20%	신설	m	3	-	-3	42,300	-	-42,300
15	일반토사(사리도)굴착배관	기계 80%+ 인력 20%	신설	m	27	24	-3	232,254	206,448	-25,806
16	경고테이프 설치	B=300㎜×1M	신설	m	30	24	-6	12,150	9,720	-2,430
17	주물프레임 신호맨홀	600×600×800(뚜껑포함)	신설	EA	2	-	-2	999,088	-	-999,088
18	주물프레임 신호맨홀	800×800×800(뚜껑포함)	신설	EA	-	2	2	-	1,060,478	1,060,478
19	주물프레임 신호맨홀	800×800×800(뚜껑포함)	철거	EA	-	1	1	-	162,023	162,023
20	맨홀 보수	600×600(프래임 교체)	보수	EA	1	-	-1	127,668	-	-127,668
21	맨홀뚜껑(주물형,600용)	442.5×442.5	신설	EA	1	-	-1	61,421	-	-61,421
22	지주(125A) 기초설치포장(가복구)	소형 고압블럭 t=6~8cm	신설	EA	1	-	-1	3,815	-	-3,815
23	맨홀(800㎜) 설치포장(가복구)	소형 고압블럭 t=6~8cm	신설	EA	1	-	-1	4,276	-	-4,276
※ 타 세부사항은 설계변경 내역서 참조

□ 보험료 및 제경비 정산

(단위 : 원)

구분	변경전 금액	변경후 금액	증·감		비고
기계경비	*******	*******	*	******
산재보험료	*******	*******	*	*******
고용보험료	******	******	*	******
건강보험료	*******	*	*	********
연금보험료	*******	*	*	********
기타경비	*********	*********	*	*******
산업안전보건관리비	*******	*******	*	********
퇴직공제부금비	*	*	*	*
노인장기요양보험료	******	*	*	*******

4		공사비 변경금액

(단위 : 원)

구 분		변경전 금액	변경후 금액	증 / 감		비고
총공사비		**********	**********	*	**********
도급비	공급가액	**********	**********	*	**********
	고용개선지원비	*	*	*	*
	부가가치세	*********	*********	*	*******
	소 계	**********	**********	*	*********

5		감리단 검토의견

□ 현장여건에 따른 물량변경 및 보험료 등 제경비 정산으로 설계변경이 필요함.

6		보고자 의견

□ 감리업체로부터 접수된 설계변경에 대하여 검토한 결과 감리의견이 적정한 것으로 판단되어 설계변경 승인하고 관리단속과에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경서류 제출 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 검증 확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.