코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	원택건설(주) 대표 오원진님(남산회현자락 한양도성 유적전시관 시공자, 이메일 발송)
(경유)
제목	전시관리실 착공을 위한 설계도서 제공 및 변경계약 준비요청(한양도성 유적전시관 )

1. 귀 사의 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서는 전시관리실(인포센터)의 공간 및 유지관리의 효율성을 위해 2020.11월부터 재설계를 진행하였고 도시계획시설(남산1근린공원) 조성계획 변경 및 관련절차 이행에 많은 시간이 소요되어 그 동안 관련공사가 중단된바 있습니다.

3. 최근(2021.9.30.) 전시관리실의 설계용역을 완료하고 관련도서를 붙임과 같이 보내드리니 공사계약 변경절차를 거쳐 착공할 수 있도록 검토하여 변경계약을 요청하시기 바랍니다.

붙임: 한양도성 유적전시관 전시관리실 설계도서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	10/07 백운석
협조자
시행	한양도성도감-8920	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)