문서번호	한양도성도감-8882
결재일자	2021. 10. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬	이원재	10/07 백운석
협 조
	주무관			이성산

설계용역 준공보고

(남산 회현자락 한양도성 전시관리실)

2020. 10.

문  화  본  부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	문화재수리 기술지도단 자문 도시공원위원회 심의(2회)
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□	유니버셜 디자인 자문
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	문화재청 설계승인
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

설계용역 준공보고

(남산 회현자락 한양도성 전시관리실)

「남산 회현자락 한양도성 유적전시관」전시관리실에 대하여 재설계용역 결과를 보고 드림

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명: 남산 회현자락 한양도성 유적전시관 전시관리실 설계용역

□ 용역기간: 2020.11.9.~2021.9.30.(11개월)

□ 계약금액: 21,300천원

□ 계약업체: ****************

※ 추진근거: 전시관리실 재설계 추진계획 방침, 한양도성도감-9507(’20.9.18.)

□ 주요과업

- 실시설계 도서 작성

- 관련법령에 의한 심의, 인·허가 등 행정절차 이행을 위한 자료작성 등

(남산1근린공원계획 심의, 공용건축물 협의 및 문화재 설계승인 도서 등)

Ⅲ		추진경위(관련절차 이행)

’20.11.11.	설계용역 착수(서울시 공공건축가)
’20.12.21.	설계용역 착수 검토회의
’21.1.26.	설계용역 중간보고 및 검토회의
’21.3.18.	남산1근린공원조성계획 변경 열람공고(15일간)
’21.4.15.	도시공원위원회 심의(재심의) 외부공간 쉼터 조성, 지붕잔디 식재, 노거수 보호, 야외 유적전시관 연계성
’21.6.21.	도시공원위원회 심의 (원안가결)
’21.7.22.	남산1근린공원 조성계획결정 및 지형도면 고시
’21.9.3.	유니버셜디자인 자문결과 반영
’21.9.30.	설계용역 최종 검토회의 및 준공접수

Ⅱ		설계용역 결과

□ 공사기간: 착공일로부터 10개월

□ 공 사 비: 875백만원(제경비 포함)

공사별 구분	공사비(자재비 포함)	비 고
건축공사	*********
기계설비공사	********
전기공사	********
통신공사	********

□ 건축개요

- 규 모: 지상1층, 전시관리실 223.9㎡ (전시, 관리실, 안내실, 화장실)

- 구 조: 철근콘크리트구조 (외벽 천연석재 붙임, 지붕층 잔디식재)

Ⅳ		행정사항

□ 설계용역 준공처리 및 준공금 지급

- 과 목: 한양도성도감, 한양도성 보존·관리, 한양도성보존·정비

시설비(401-01)

- 지급금액: 21,300,000원

□ 향후계획

- 2021.10.  문화재청 설계승인

중구청 공용건축물 협의

공사변경 계약 및 착공준비

☞ 기획재정부, 국유지내 영구시설물 축조승인후 착공.  끝.