문서번호	시설보수과-7973
결재일자	2021. 10. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
송준행		이화신	10/08 고영준
협조

준공기한 연기 검토 보고

(노원교 외 1개소 보수공사)

2021.  10.

북부도로사업소

(시설보수과)

준공기한 연기 검토 보고

(노원교 외 1개소 보수공사)

『노원교 외 1개소 보수공사』시행 중, 감독기관인 시설공단에서 준공기한 연기 실정이 검토 제출되어 보고 드림.

1		관련근거

○ 준공기한 연기 검토 보고서 제출【서울시설공단 공사감독2처-12659호(‘21.10.7.)】

2		공사개요

◯ 공 사 명 : 노원교 외 1개소 보수공사

◯ 공사기간 : 2021.4.19 ~ 2021.10.15.

◯ 도 급 비 : 468,386,100원

◯ 공사개요 : 아스팔트 포장 26.0a, 교면방수 2,595㎡

신축이음 및 후타보수 88m, 보도부 보수 230㎡ 등

◯ 도 급 사 : 우리경안건설㈜ 대표 남봉예

3		보고내용

□ 준공기한 연기

○ 당초 공사기간을 착공일로부터 180일 계약하였으나, 관급자재 아스콘 구매 및 선정시험 기간 지연, 하절기(8월) 아파트 밀집지역 민원 예상과 품질 확보를 위해 작업대기 등으로 절대공기(현 공정율 30%)가 부족한 실정으로

○ 위 실정임을 고려하여 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토부 고시 제2021-1080호) 및 제6조(공사기간 산정)에 따라 산출된 초과일수를 반영하여 준공기한을 연기코자 함.

【 관 련 근 거 】

제6조 (공사기간 산정)	공사기간은 준비기간과 비작업일수, 작업일수, 정리기간을 포함하여 산정한다.

※ 공사기간 = 준비기간 + 작업일수 + 비작업일수 + 정리기간

【공공건설공사의 공사기간 산정】

- 공사기간	=	준비기간	+	작업일수	+	비작업일수	+	정리기간
(220일)		(90일)	+	(30일)	+	(70일)	+	(30일)

○ 준공기한 연기

- 당  초 : 2021.4.19. ~ 2021.10.15.

- 변  경 : 2021.4.19. ~ 2021.11.24. (증 40일)

- 지체상금 부과 여부 : 미부과 (※ 귀책사유 – 서울시)

4		조치계획

○ 상기 보고내용과 같이, 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 준공기한연기 관련 서류 일체 1부.  끝.