문서번호	기전과-8496
결재일자	2021. 10. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
이중현		석대창	10/08 차창훈
협조
	주무관		代최민규

『2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사』 실정보고에 대한 검토 보고

2021. 10.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사』

실정보고에 대한 검토 보고

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사와 관련하여 책임감리원으로부터 제출된 공사 실정보고에 대한 검토 결과를 보고함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

□ 공사위치 : 서초구 교대부속초교 외 6개소

□ 공사내용 : 교통사고 잦은 지점 내 교통시설물 개선

○ 신호제어기 신설 및 교체 4대

○ 신호지주 신설 및 교체 20본

○ 신호지주 이설, 통합지주(신호등+가로등) 설치

○ 교통신호등 신설 및 이설, 신호케이블 배관/배선 공종 등

□ 계약금액 : *************

□ 계약업체 : **************

□ 계약기간 : 2021. 7. 8. ~ 2021. 10. 15.

□ 책임감리업체 : *************

Ⅱ		실 정 보 고

□ 주요실정보고

순번	위치	공종	구분	단위	수량			변경사유	증·감(원)
					당초	변경	증·감
1	남부 터미널 교차로	조가선와이어로프(6mm)	신설	m	***	***	**	지하철 지하보도 상판으로 P9 기초앙카 설치 불가, P14 기초 재사용에 따른 가공선로 경로 변경으로 조가선 및 애자 물량 변경 (기존:P9->P2->P1 변경:P9->P10->P1)	*********
		애자 및 밴드전주용 Ø250×150㎜	신설	EA	*	*	*
		애자 및 밴드지주용 Ø220×100㎜	신설	EA	*	*	**
2	CU 교대역점 앞	지주 신설관급 Ø125㎜×4M	신설	본	*	*	**	P1 차량지주에 보행등 통합설치로 P2 보행지주설치 제외	***********
		지주기초앙카 개소추가시Ø125㎜	신설	조	*	*	**
		교통신호등지주 철거Ø150㎜×8M	철거	본	*	*	**	P3→H4 구간 굴착불가에 따른 가공선로 변경물량 반영 ※ 2021년 하반기 도로관리심의회 심의결과(241번) 서초구청 도로과-16152(2021.7.16.)
		기초앙카 부분제거Ø150㎜×0.3M	철거	EA	*	*	**
		소형고압블럭 굴착배관	신설	m	**	*	***
		일반토사(사리도) 굴착배관	신설	m	*	*	*
		관구마개 설치Ø50㎜	신설	EA	*	*	**
		전선관 배관PE Ø54㎜1열	신설	m	**	*	**
		전선관 배관PE Ø54㎜2열	신설	m	**	*	***
		전선관 배관PE Ø100㎜1열	신설	m	*	*	*
		신호케이블 지중1선F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	***	**	***
		신호케이블 지중2선F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	**	**	**
		신호케이블 지중5선F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	*	**	**
		신호케이블 가공1선F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	*	**	**
		전원선 지중1선F-CV,6SQ/2C	신설	m	**	**	**
		전원선 가공1선F-CV,6SQ/2C	신설	m	**	***	**
		조가선와이어로프(6mm)	신설	m	**	***	***
		애자 및 밴드전주용 Ø250×150㎜	신설	EA	*	*	*
		애자 및 밴드지주용 Ø220×100㎜	신설	EA	*	*	*
		일반토사(사리도) 굴착배관	신설	m	*	*	*
		경고테이프 설치B=300㎜×1M	신설	EA	***	**	***
		주물프레임 신호맨홀600	신설	EA	*	*	**
		보행 안내도우미	신설	인	*	*	**
3	호텔 아르누보서초앞	적산전력량계 외함 철거	철거	EA	*	*	**	기 철거됨	***********
		교통신호등지주 Ø150㎜×8M	이설	본	*	*	*	H4→P7 구간 굴착불가에 따른 가공지주 변경물량 반영 ※ 2021년 하반기 도로관리심의회 심의결과(244번) 서초구청 도로과-16152(2021.7.16.)
		신호등지주 철거Ø150㎜×8M	철거	본	*	*	**
		지주기초 및 앙카Ø150㎜	신설	조	*	*	*
		기초앙카 부분제거Ø150㎜	철거	EA	*	*	**
		전선관 배관PE Ø54㎜2열	신설	m	**	*	***
		보행 안내도우미	신설	인	*	*	**
		기초앙카 부분제거Ø200㎜	철거	EA	*	*	**	설계 시 물량 오류
		교통신호등지주 Ø200㎜×8M	철거	본	*	*	**
		신호케이블 가공1선F-CVV,2.5SQ/5C	신설	m	*	**	**	H4→P7 구간 굴착불가에 따른 가공선로 변경물량 반영
		신호케이블 가공4선F-CVV,2.5SQ/5C	신설	m	*	**	**
		신호케이블 지중1선F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	***	**	***
		신호케이블 지중2선F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	**	**	*
		신호케이블 지중6선F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	*	*	**
		전원선 지중1선F-CV,6SQ/2C	신설	m	***	**	***
		전원선 가공1선F-CV,6SQ/2C	신설	m	*	***	***
		조가선와이어로프(6mm)	신설	m	*	***	***
		애자 및 밴드지주용Ø220	신설	EA	*	*	*
		전선관배관 PE Ø100㎜1열	신설	m	*	*	**
		전선관배관 PE Ø100㎜2열	신설	m	**	*	***
		소형고압블럭 굴착배관	신설	m	**	*	***
		스톤블록 굴착	신설	m	**	*	***
		주물프레임 신호맨홀600	신설	EA	*	*	**
		후강전선관 배관 (야간)Ø54㎜2열	신설	m	**	**	*	H2→H7 구간 한전, 통신, 도시가스 배관 등의 지장물로 인해 Ø104㎜ 후강전선관 설치 불가 (Ø54㎜ 후강전선관으로 변경)
		후강전선관 배관 (야간)Ø104㎜2열	신설	m	**	*	***
		아스팔트 횡단굴착(야간)	신설	m	**	**	**
		관구마개 설치 Ø100㎜(삽입형)	신설	EA	*	*	**
		관구마개 설치 Ø50㎜(삽입형)	신설	EA	*	*	**
		경고테이프 설치B=300㎜×1M	신설	EA	***	**	***
		아스팔트횡단굴착 교통정리요원배치(야간)	신설	hr	**	**	*
		지주형좌대기초설치 스톤블록 포장	신설	EA	*	*	*	굴착구간 민원방지 및 사고 예방을 위한 가복구 물량 반영
		맨홀(800㎜)설치 스톤블록 포장	신설	EA	*	*	*
		굴착 복구 스톤블록 포장	신설	m	*	*	*
		맨홀(800㎜) 설치 블록 포장	신설	EA	*	*	*
4	공통	공사용 안내간판 900*1800mm	신설	EA	*	*	*	민원방지 및 사고 예방에 따른 물량 반영	*********

□ 변경금액(예상)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액	비 고
도급비	공 급 가 액	***********	***********	**********
	부가가치세	**********	**********	*********
	합 계	***********	***********	**********

□ 책임감리원 기술검토 의견

○ 2021년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사와 관련, 현장여건을 반영하여 실제 시공물량의 변경이 필요하다고 판단됨.

※ *****************************************

Ⅲ		보 고 자 의 견

□ 실정보고에 대한 검토 결과

○ 서초구청 하반기 도로관리심의회 결과에 따라 CU교대역점 앞, 호텔아르누보서초 앞 보도굴착 불가로 해당 구간은 가공케이블 설치가 필요됨

○ 가공선로 변경으로 가공케이블(2061m→2119m), 지중케이블(2101m→2038m), 전선관배관(566m→285m) 등 물량 변경

○ 위 사항 등에 따른 물량변경 사항을 현장에 맞게 변경하는 것이 타당하므로 책임감리원으로부터 제출된 공사 실정보고에 대해 승인 하고자 함.

붙임  1. 책임감리원 실정보고서 1부.
2. 서초구청 하반기 도로관리심의회 관련 공문 1부  끝.