투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경시행[2021년 교통사고잦은곳 개선사업 교통신호기 공사]

1. 기전과- 8820호(2021.10.8.)2021년 교통사고잦은곳 개선사업 교통신호기공사 설계변경

검토보고 와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진중인 2021년 교통사고잦은곳 개선사업 교통신호기 공사와 관련하여 설계

변경 서류가 접수되어 검토한 바 적합하여 기성정산을 위한 설계변경을 하고자 계약의뢰를 합니다.

가. 공 사 명: 2021년 교통사고잦은곳 개선사업 교통신호기 공사

나. 공사기간: 2021. 7. 21. ~ 2021. 10. 18

다. 시공업체: ㈜ 태건전설 나태균

라. 공사금액: ************

마. 설계변경

❍ 공사금액 변경                                                       (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공사비		63,134,170	67,850,000	4,715,830	▲증
도급비	공급가액	57,394,700	61,681,819	4,287,119	▲증
	부가가치세	5,739,470	6,168,181	428,711	▲증
	계	63,134,170	67,850,000	4,715,830	▲증

❍ 설계변경 사유

- 2021년 교통사고잦은곳 개선사업 교통신호기 공사작업 완료에 따른 물량변경 및

신규일위대가 적용하여 기성준공 정산 위해 설계변경 필요.

바. 예산과목: 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 교통사고 잦은곳 개선, 시설비

붙임 :  1. 미집행액 사용계획 보고 1부.
2. 설계변경검토보고 1부.
3. 설계변경제출서류(감리사) 1부.

4. 설계변경내역서 및 합의각서 각 1부. 끝.

	기전과장
주무관	조계진		기전과장	10/08 이상연
협조자
시행	기전과-8832	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 북부도로사업소 (번동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	944-5473	/전송	945-5074	/	sorj72@seoul.go.kr	/	부분공개(7)