코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	문화재 감리용역 계약변경 의뢰(남산 회현자락 한양도성 유적전시관)

우리본부에서 시행중인「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성공사 문화재상주감리 용역」에 대한 변경계약(총차 및 2차분)을 의뢰하오니 처리해 주시기 바랍니다.

가. 계약내용

- 계 약 건 명: 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사 문화재 상주감리

- 계약상대자: ******************

- 계 약 금 액: 총차 525,500,000원(1차 347,098,000원)

- 전체 계약기간 : 2018.11.9.∼ 2021.12.31.

나. 총차 및 1차 변경내용 : 계약금액 및 준공기한(공사기간) 변경

(단위:원)

구 분		변경전	변경후	증·감
계약 금액	총차	525,500,000	525,500,000	-
	1차	347,098,000	347,098,000	준공
	2차	178,402,000	178,402,000	변동없음
용역 기간	총차	2018.11.9.∼ 2021.12.31.	2018.11.9.∼ 2022.12.31.	증)315일
	1차	2018.11.9.∼ 2020.7.21.	2018.11.9.∼ 2020.7.21.	준공
	2차	2020.7.22.∼2021.12.17.	2020.7.22.∼2022.10.15.	증)315일

- 연장사유: 전시관리실 재설계 기간중 공사가 중단됨에 따라 감리원배치 변경 및 감리용역 기간 연장

다. 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 남산 회현자락 한양도성 보존·정비, 감리비

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 방침서(문화재 감리용역 변경계약 검토보고) 1부

3. 합의각서 1부

4. 산출내역서 등 1부.  끝

	한양도성도감과장
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	10/08 백운석
협조자
시행	한양도성도감-8981	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)