문서번호	교량안전과-15424
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		강천수	10/12 조현석
협조

「2021년 강교 보수공사(연간단가)」

낙찰차액 등 활용계획 검토 보고

2021. 10.

안전총괄실

(교량안전과)

「2021년 강교 보수공사(연간단가)」

낙찰차액 등 활용계획 검토 보고

「2021년 강교 보수공사」 시행 중 천호대교 도장보수에 소요되는 예산이 부족하여 이전비 및 낙찰차액 활용계획을 검토하고 보고 드림.

□ 관련근거

○ 시설비 및 시설부대비 낙찰차액 사용관련 안내[예산담당관-4883호(2020.4.3.)]

- 동일 단위사업 내 세부사업 간 동일 편성목으로 예산변경 사용 가능

○ ‘21년 상반기 천호대교 집중점검(과단위) 결고 보고[교량안전과-7353호(2021.5.10.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 강교 보수공사(연간단가)

○ 공사내용

- 도장손상부 도장보수 2,250㎡, 강재 손상부 강재보강 1ton, 용접 100m, 볼팅 150개 , 기타 부대공 1식

○ 공사기간 : 2021. 04. 05. ~ 2021. 12. 10.

○ 총사업비 : 446,823천원(도급비434,823, 이전비12,000)

○ 시공사/사업관리 : 늘찬건설㈜외 1개사 / ㈜동명기술공단 외 2개사

□ 일상유지 산내역

○ 예산현황

*** ****	***********			**** *****	**
	*	***	***
*******	*******	*******	******	******

※ 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 강교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비(500,000원)

○ 그동안 작업지시 현황

(단위:천원)

구 분		작업지시 물량		작업지시 금액 (천 원)	비 고
**	****	********	*	*******
**	****	********	*	******
**	***	********	*	*******
		*********	***
**	****	********	*	*******	**********
		**********	*
****				*******	*************

□ 천호대교 도장보수 대상 현황(5차 작업지시 예정)

***********************

○ 파손된 시설물 보수·보강 및 정비 대상

구분	손상위치	손상현황	손상면적	비 고
			(㎡)
1	본선(외부)	도장박리	22.80
2	본선(내부)	녹 발생	2.87
3	본교(외부)-신축이음P3	녹 발생	78.14
4	본교(외부)-신축이음P7	녹 발생	156.27
5	본교(외부)-신축이음P11	녹 발생	78.14
6	램프B(외부)-P1~P2	도장박리	43.27
7	램프B(외부)-P2~P3	도장박리	98.08
합 계			476.70

- 현황사진

****************************************

********************

□ 조치계획

○「2021년 강교 보수공사(연간단가)」에 작업지시 예정인 천호대교 도장보수는 낙찰차액을 활용하여 우선 시공하고 추후 설계변경코자 함.

**************

***	*******			**** ********	***
	***	****	*
*******	******	******	******	******	****************

*******************************

붙임 : 1. 시설비 및 시설부대비 낙찰차액 사용관련 안내 – 1부.

2. ′21년 상반기 천호대교  집중점검(과단위) 결과 보고 - 1부. 끝.