문서번호	시설보수과-7813
결재일자	2021. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
송일섭		代기효상	10/13 이규상
협 조

「일원터널 외 4개소 정밀안전점검용역」

설계변경 검토보고(정정)

2021. 10.

동부도로사업소

(시설보수과)

설계변경 검토보고(정정)

【일원터널 외 4개소 정밀안전점검용역】

우리 사업소에서 시행중인『일원터널 외 4개소 정밀안전점검용역』완료에 따른 정산(자문비 등) 설계변경 사항을 보고함

1		용역개요

❍ 용 역 명 :『일원터널 외 4개소 정밀안전점검용역』

❍ 용역기간 : 2021.4.21 ~ 2021.10.21.

❍ 계약금액 : 100,279천원

❍ 대상시설 : 일원터널, 위례지하보차도, 천호지하차도, 가락지하차도, 대곡교

❍ 계 약 자 : (주)한국구조물안전연구원  대표 이채규

2		설계변경

❍ 설계변경 사유 : 신공종 및 물량 증·감 발생

- 가락지하차도 포장층 코아채취비용 발생(시설보수과-3454(2021.4.28.))

- 천호지하차도 평면화사업으로 인한 교통안전시설 비용 감소

- 자문비 정산

- 계약내역서 세부내역 정정(시설물별 명칭 오기 수정)

❍ 설계변경 내역

(단위:원)

**	*****			**
	***	***	***
****	***********	**********	************
****	**********	**********	************
*****	*********	*********	************
*******	*********	*********	************

3		조치의견

❍ 변경사항에 대하여 설계변경 시행하고 관리단속과에 설계변경 계약 의뢰코자 함.

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.