투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	농축기동 슬러지 공급설비 정비공사 관련 작업지시 계획(2차)

1. 운영과-11549(2021. 10. 8.)와  관련입니다.

2.「농축기동 슬러지 공급설비 정비공사」관련 운영과 협조요청 사항을 검토한 결과 적정하여 아래와 같이 작업지시하고자 합니다.

가. 계약업체:****************

나. 협조요청사항

연번	요 청 사 항	검토결과
1	헤더 이물질 제거를 위한 소제구 설치 - 기존 : 이물질 제거용 단관 - 변경 : 이물질 제거용 소제구 - 350A 정티 1ea, 플랜지 및 맹플랜지 각 1ea 소요	적정
2	공정관리를 위한 배관라인 제작 - 신규 C계열 배관과 기존 배관(D소화조, 탈수기동 이송배관)을 연결하는 보완라인 신설 - 배관125A 및 차단밸브 2개소	적정

※ 작업지시한 내용 시공사 검토 후 실정보고 및 설계변경 실시

붙임  1. 협조요청공문 1부.

2. 작업지시서 1부.  끝.

주무관	김태윤		시설보수과장	10/13 임준빈
협조자
시행	시설보수과-8729	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2211-2579	/		/	부분공개(5)