문서번호	도로보수과-9676
결재일자	2021. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권은용		윤옥광	10/13 김영철
협조
	주무관		이이용

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

2021년 도로굴착복구공사(연간단가)-서부  작업지시 (제13차) 시행계획 보고

2021. 10.

작업지시(제13차)시행계획 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로굴차복구공사(연간단가)-서부

○ 공사기간 : 2021. 3.31 ~ 2021.12.31

○ 시 공 사 : ****************

○ 총사업비 : ***********

***********************************************************

□ 보고내용

○ 관내 유관기관 한국전력공사, SK텔레콤등의 관리청복구 의뢰에 따른  “2021년 도로굴착복구공사(연간단가)” 제13차 작업지시 계획보고임.

- 위    치: 서대문구 남가좌동 344-35 등 9개소

- 작업기간: 2021.10.14 ~ 12.10

- 정비규모: **********************

- 복구물량: *******************

*******************************************

-************************************************

○ 도로굴착복구 13차 작업 세부내역

연번	복구의뢰 신청기관	위 치	복구요청 및 지시물량				작업조건		비 고 (허가번호)
			공종	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	주	야
1	한국전력공사 서울지역본부	서대문구 남가좌동 344-35 외 4개소 (증가로)	굴착복구공사	5.0	6.0	30.0 (5개소)		○	서대문-2021 전기-56
			표층확폭복구	5.3	6.3	33.4 (5개소)
2	한국전력공사 서울지역본부	중구 흥인동 146-1 ~ 신당동 99 (퇴계로)	굴착복구공사	1.2	365	438.0		○	중구-2021 전기-108
			차로단위복구	3.2	365	1,168
3	SK텔레콤(주)	중구 남학동 18-1 (퇴계로)	굴착복구공사	1.2	9.0	10.8		○	중구-2021 통신-65
			표층확폭복구	1.5	9.3	13.9
4	한국전력공사 마포용산지사	용산구 이태원동 685 (녹사평대로)	굴착복구공사	1.8	26.0	46.8		○	용산구-2021 전기-129
			표층확폭복구	2.1	26.3	55.2
5	SK텔레콤(주)	중구 충무로2가 111 (퇴계로)	굴착복구공사	1.2	8.0	9.6		○	중구-2021 통신-70
			표층확폭복구	1.5	8.3	12.4
6	SK텔레콤(주)	중구 을지로2가 65-39 (을지로)	굴착복구공사	1.2	8.0	9.6		○	중구-2021 통신-69
			표층확폭복구	1.5	8.3	12.4
7	한국전력공사 서대문은평지사	서대문구 홍제동 143-6 ~95-2 (통일로)	굴착복구공사	1.2	85.0	102.0		○	서대문-2021 전기-61
			차로단위복구	3.2	85.0	272
8	한국전력공사 마포용산지사	용산구 한강로2가 357-2 (한강대로)	굴착복구공사	1.2	80.0	96.0		○	용산구-2021 전기-132
			차로단위복구	3.2	80.0	256
9	㈜ LG유플러스	중구 을지로2가 을지로100 (을지로)	굴착복구공사	1.2	20.0	24.0		○	중구-2021 통신-76
			표층확폭복구	1.5	20.3	30.4
합 계			굴착복구공사	1.2 ~5.0	607	886
			표층확폭복구	1.5 ~5.3	78.8	291
			차로단위복구	3.2	530	1,696

□ 조치계획

○ 상기와 같이  도로굴착복구공사(연간단가) 건설사업관리단(제2권역,(주)경동엔지니어링) 및 시공사에게 제13차 작업지시 통보 및 시행.

○ 정비물량은 개략작업으로 건설사업관리단 작업완료 보고서에 따라 정산

□ 행정사항

○ 해당 노선 관할 경찰서와 교통통제 사전 협의로 시민불편 최소화

○ 아스콘 플랜트사 생산여부 확인 및 공사장 안전 및 관리점검 철저

- 임시포장구간 재료분리 최소화 및 주변 잔재 제거철저

- 공사장 안전사고 사전예방 철저

※ 참고사항 : 도급비 집행현황

구 분	계약금액	기 작업지시금액 (1차～12차)	금회작업지시금액 (13차)	집행잔액
**** ****	*********	*********	*******	*******

붙임 : 1. (개략)제13차 작업지시내역서(위치도포함) 1부.

2. 작업지시서(제13차)  끝.