투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(일원터널 외 4개소 정밀안전점검용역)

우리 사업소에서 시행중인 『일원터널 외 4개소 정밀안전점검용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 일원터널 외 4개소 정밀안전점검용역

나. 용역기간 : 2021.4.21 ~ 2021.10.21.

다. 도 급 자 : ㈜한국구조물안전연구원  대표 이채규

라. 도 급 비 : 100,279,000원

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		용 역 비			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총용역비		100,279,000	98,911,000	감) 1,368,000
도급비	공급가액	89,087,455	89,010,000	감) 77,455
	부가세	8,908,745	8,901,000	감) 7,745
	자문비	2,282,800	1,000,000	감) 1,282,000

바.  예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 교량시설물점검관리, 교량시설물안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비(64,658,700원 → 63,528,000원)

- 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영(도시개발특별회계), 시설물안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비(35,620,300원 → 35,383,000원)

사. 설계변경 사유

- 신규공종 발생 및 물량증감 발생, 자문비 정산 등

붙임   1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 검토보고서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝

	시설보수과장
주무관	송일섭		시설보수과장	10/13 代기효상
협조자	주무관	장인숙
시행	시설보수과-7815	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)