문서번호	도로보수과-9686
결재일자	2021. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권은용		윤옥광	10/13 김영철
협조
	주무관		이이용

2021년 도로함몰예방사업

1차 설계변경 시행계획 보고

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

2021.10.

2021년 도로함몰예방사업

1차 설계변경 시행계획 보고

우리사업소에서 시행중인 2021년 도로함몰예방사업(서부)과 관련하여 설계변경 검토사항이 있어 아래와 같이 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로함몰예방사업-서부

○ 공사기간 : 2021. 3.9 ~ 2021.12.31

○ 시 공 사 : *****************

○ 복구물량 : 원인조사 및 복구 35개소

○ 총사업비 : *******

*****************************************************

□ 관련문서

○ 공동조사 복구요청(시 → 사업소)

- 도로관리과-******************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 소요예산 요청(사업소 → 시)

- 도로보수과-****************

○ 예산 재배정 알림(시 → 사업소)

- 도로관리과-*****************

○ 예산 재배정에 따른 시행계획 보고

- 도로보수과-****************** :  ***************

□ 보고내용

○ 상기 호와 관련하여 시 동공탐사 용역(4-1구역) 결과에 대해 원인조사 및 조치결과 보고

- *******를 발주 및 시행코자 하였으나,

- 서울시에서 추진하고 있는 동공탐사 용역 시행 중 원인조사 및 항구복구 통보에 따라 ************으로 이에 따른 설계변경사항이 발생함.

□ 조치계획

○ 『2021년 도로함몰예방사업(서부)』에 반영하여 설계변경을 시행코자 하며,

○ **************************************************************하여 설계변경

- 설계변경금액

구분	설계변경금액(원)		증감	비고
	당초	변경
총공사비	***********	***********	*************	**************
도급비	************	***********	*************
관급비	**********	**********	*************
이설비	**********	**********	*************

- 설계변경수량

구분	설계변경수량(개소)		증・감	비고
	당초	변경
계	**	**	****

□ 향후계획

○ 2021.10.30. : 시 동공조사 결과보고(사업소 → 市도로관리과)

○ 2021.11.25. : 정산설계변경(2차)

○ 2021.12.10. : 공사준공

붙임 : 1. 공동조사 결과에 따른 도로굴착복구 요청 공문 각1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약금액조정검증확인서 1부.

4. 예산재배정에 따른 시행계획보고서 1부.

5. 예산요청 및 예산재배정 통보 각 1부.  끝.