문서번호	시설관리과-23794
결재일자	2021. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
백창진		유세종	전결 10/13 김상웅
협 조

현장실정 보고(3차)에 따른 검토
현장실정 보고(3차)에 따른 검토

2021. 10.

중부수도사업소

(시설관리과)

- 월곡4중블록 무단수 급수체계 구축공사 -

현장실정 보고(3차)에 따른 검토

우리 사업소에서 추진 중인 「월곡4중블록 무단수 급수체계 구축공사」와 관련하여, 현장실정보고보가 접수된바 아래와 같이 검토사항을 보고 드림.

※ 관련: 공사감독2처-10072(2021. 10. 13.)「현장 실정보고서 제출(지하지장물 발생)」호

공사 현황

○ 공 사 명: 월곡4중블록 무단수 급수체계 구축공사

○ 공사기간: 2021. 5. 31.~2021. 10. 27.

○ 계약금액: ************

○ 공사개요: ***********************

○ 계약업체: ****************

주요 사항 및 검토 내용

< 기관별 주요 의견 요약 >

시공사 의견	*************************************************************************************************************************************************************************
공단 검토 의견	****************************************************************************************************************************
담당자 검토 의견	***********************************************************************************************

< 기관별 검토 내용 >

시공사 검토 내용

○ 현황 및 문제점

- ******************************************************************************************************************

○ 검토 의견

- 횡단굴착에서 확인할 결과 하월 작업이 매우 위험하고 불가능이 예상되는바 가장 현실적인 방법은 강관 압입 추진으로 예상됨

※ *****************************************

현 황 도

공단 검토 내용

○ 현황 및 문제점

- ***********************************************************************

- ***********************************************************************

위 치 도	횡단굴착 현황

○ 검토 의견

- 지하지장물(하수박스) 저촉으로 인해, 당초 설계된 굴착 후 ***********************

- *****************************************************************

- 강관 압입 추진 시 개략공사비

공종	********************************	*********
	********************************* ****************************	**********
계		***********

담당자 검토 의견

○ 강관 압입 추진 공법으로 변경 시행 적정

- *********************************************************************

- 확인굴착을 통해 관로 우회 부설 등을 고려하였으나, 하수박스가 월계로를 횡단하여 부설되어 있어 **************

○ 가설구조물 구조적 안전성 확인 필요

- 건설기준진흥법 시행령에 의거, 강관 압입 추진 시 흙막이 가시설 등에 대한 구조검토 및 안정성 검토 실시 필요

제101조의2(가설구조물의 구조적 안전성 확인)

① 법 제62조 제11항에 따라 건설사업자 또는 주택건설등록업자가 같은 항에 따른 관계전문가(이하 “관계전문가”라 한다)로부터 구조적 안전성을 확인받아야 하는 가설구조물은 다음 각 호와 같다.  <개정 2019. 6. 25., 2020. 1. 7., 2020. 5. 26.>

⁝

3. 터널의 지보공(支保工) 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공

⁝

○ 본부(배수과)로 강관 압입 추진 공법에 따른 부족예산 재배정 요청 필요

- ***************************************************************************

조치 계획

○ 부족예산 재배정 요청(시설관리과→배수과)

○ 예산 재배정 가능 시, 공법 변경 및 가설구조물 안정성 검토 시행토록 회신(시설관리과→시설공단)

붙임  공단 공문 및 실정보고서 각 1부.  끝.