“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약요청(백련아리수올림터 모터펌프 제작구매 설치)

1. 우리 사업소에서 추진중인 「백련아리수올림터 모터펌프 제작구매설치」에 대하여 아래와 같이 변경계약을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 백련아리수올림터 모터펌프 제작구매 설치

나. 계약기간 : 2021.04.30.~2021.10.28

다. 계약금액 : **********************************

라. 계 약 자 : ***************

마. 변경사유 : 백련아리수올림터 저압화에 따른 한전 전기공급 지연에 따라 아리수올림터 모터펌프 및 배관교체 지연

바. 변경내용

구 분	당 초	변 경	비고
계약금액	************	************	변경없음
납품기간	2021.4.30.~ 2021.10.28	2021.4.30.~ 2021.11.27

사. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 합의서 1부

2. 납품기한 연기 보고서 1부 끝.

	시설관리과장
주무관	이두영		기전팀장	오정훈		시설관리과장	10/12 이준호
협조자
시행	시설관리과-17366	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3723	/전송	02-3146-3739	/		/	부분공개(5)