문서번호	균형발전정책과-3061
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	광화문광장관리팀장	균형발전정책과장
방기환	이창길	10/12 김희갑

2021년 광화문광장 승강기 유지보수 용역

설계 변경 및 정산 보고

2021. 10.

균형발전본부

(균형발전정책과)

2021년 광화문광장 승강기 유지보수 용역

설계 변경 및 정산 보고

2021년 광화문광장 승강기 유지보수 용역에 대하여 새로운 광화문광장 조성공사가 착공됨에 따른 물량 감소분을 반영하여 설계 변경 및 정산처리하고자 함

□ 용역개요

○ 건    명 : 2021년 광화문광장 승강기 유지보수 용역

○ 계 약 자 : 주식회사 영덕이엔지(대표 정대현)

○ 계약금액 : 금8,000,000원(금팔백만원)

○ 계약기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

□ 설계변경 내역 및 금액

○ 새로운 광화문광장 조성공사 착공에 따른 물량 감소분

○ 설계변경 내역

내 용	수 량(%)		증․감	비 고
	당초	변경
승강기 점검기간 축소 (12개월 → 2개월)	100%	17%	감83%

○ 설계변경 금액

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증․감(원)	비 고
총 용역비	8,000,000	1,333,330	감6,666,670

□ 향후 추진계획

○ 물량 감소분 정산에 따른 설계변경 사항으로서 변경 계약 시행코자 함.

붙임  설계변경내역서 및 합의각서 각 1부.  끝.