투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(박물관과장)
(경유)
제목	서서울미술관 건립공사 설계용역 관련 진행사항 알림

1. 건축부-16153(2021.10.12.)호와 관련입니다.

2. 서서울미술관건립공사 설계용역과 관련하여 설계공정회의 공정회의 결과 진행사항에 대하여 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 설계공정회의 주요 내용

- 도시공원심의 재심의 등으로 일정 조정 요구 ⇒ 설계자 3.5개월 연장 요청

- 기성청구 일정 ⇒ 공공건축물협의 접수도서 납품후 기성청구

- 각종인증수수료 ⇒ 발주부서 별도납부(2021년 예산별도 확보되어 있어 도기본처리)

- 주차진출입로 교통전문가 용역비 추가 ⇒ 설계용역비에 포함하여 정산 처리

붙임  1. 설계공정회의 결과보고서. 1부.

2. 공정회의 회의록(설계용역 일정표 포함). 1부.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이제관		문화시설과장	박근우		건축부장	10/12 신명승
협조자
시행	건축부-16210	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층(무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02) 3707-2628	/전송	02) 3708-2659	/	uasia1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)