문서번호	도로보수과-9113
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
황태선		김순수	10/14 고영준
협 조

『도봉구 특별시도 구간 시인성 개선 공사』

설계변경(1회) 검토 보고

2021 .  10.

북부도로사업소

(도로보수과)

『도봉구 특별시도 구간 시인성 개선 공사』

설계변경(1회) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인『도봉구 특별시도 구간 시인성 개선사업 』와 관련 공사 추진에 따른 설계변경(1회)시행 검토보고 임.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명: 도봉구 특별시도 구간 시인성 개선 공사

○ 공사기간: 2021. 04. 26. ~ 2021. 12. 31.

○ 공사내용: 태양광표지병 4,880개소 설치

○ 공 사 비: *************************************

○ 도 급 자: *******************

Ⅱ		설계 변경 사유

○ 종로 버스전용차로 안전지대 요청(서울시 교통운영과-7424호,‘21.05.20)

○ 사직터널 진·출입부 쏠라표지병 설치 요청 (시설보수과-7607호,‘21.9.27.)

○ 작업 노선에 따른 정비물량 변경(도봉로, 마들로 등)

Ⅲ		주요 변경 내역

○ 변경금액

(단위 : 원)

구 분		금 액		증·감
		당 초	변 경
*****		***********	***********	************
*****	****	***********	***********	*************
	*****	**********	**********	*************
	*	***********	***********	************
***		***********	***********	************

○ 주요공종 물량 변경 내역

공 종	규 격	단위	수 량		증·감
			당 초	변 경
도로표지병 설치공	태양광 도로표지병 설치	개소	*****	*****	증)	***

Ⅳ		조치계획

○ 상기 보고내용와 같이 태양광표지병 설치 물량 증·감에 따른 부족 예산(58백만원)은 낙찰차액 등 집행잔액******)을 사용 설계변경(제1회)을 시행하고 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 변경설계서(1회) 1부.

2. 제비율검증표 1부.

3. 설계변경사유서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.