“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	뉴디자인과-6102		주무관	지역발전팀장		뉴디자인과장		뉴디자인국장
			윤호준	서혁수		공승호		10/14 김희주
등록일자	2021.10.13.
결재일자	2021.10.14.
공개구분	부분공개(5)
			협조자

- 협업지능기반 로봇플러스 경쟁력 지원사업 추진을 위한 -

강남 로봇거점지구 조성 예산 명시이월 계획

명시이월 예산 : 총 3,867,212천원                         (단위 : 천원)

단위사업	세부사업	편 성 목	예 산 액	이 월 액
강남 뉴디자인 추진	강남 로봇거점지구 조성	일반운영비 (201)	3,348	3,348
		시설비 및 부대비 (401)	4,679,530	3,863,864
계			4,682,878	3,867,212

명시이월 사유

❍ 협업지능기반 로봇플러스 경쟁력 지원사업 관련, 토양정밀조사 등으로 공간구축 공사가 지연(중지)됨에 따라 회계연도 내 공사 관련 예산집행이 어려워(2022년 상반기 재착공 예정) 명시이월 필요

예산과목

❍ 뉴디자인과, 품격 있는 강남 만들기, 강남 뉴디자인 추진, 강남 로봇거점지구 조성, 일반운영비, 사무관리비 (3,348천원)

❍ 뉴디자인과, 품격 있는 강남 만들기, 강남 뉴디자인 추진, 강남 로봇거점지구 조성, 시설비 및 부대비, 시설비 (3,807,404천원)

❍ 뉴디자인과, 품격 있는 강남 만들기, 강남 뉴디자인 추진, 강남 로봇거점지구 조성, 시설비 및 부대비, 감리비 (56,460천원)

	강 남 구
(		뉴디자인과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방재정법 제50조 및 동법 시행령 58조 (세출예산의 이월) • 서울특별시 강남구 재무회계규칙 제16조(예산의 이월), 제27조(이월예산의 집행) • 로봇플러스사업 추진계획 (뉴디자인과-6210, 2020. 6. 9.) • 2020년도 협업지능기반 로봇플러스 경쟁력지원사업 선정 (2020. 6.25.)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 협업지능기반 로봇플러스 경쟁력 지원사업 관련, 토양정밀조사 등으로 공간구축 공사가 지연됨에 따라 원활한 공사수행 및 예산집행을 위해 명시이월을 추진하고자 함.
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 지역주민
분 야 별 검토사항 [계속 : v ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ------------------- ( v ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ------------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ------------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ------------------- ( v ) ⑤ 시장조사 ------------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ------------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ------------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ------------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

- 협업지능기반 로봇플러스 경쟁력 지원사업 추진을 위한 -

강남 로봇거점지구 조성 예산 명시이월 계획

협업지능기반 로봇플러스 경쟁력 지원사업 관련, 토양정밀조사 등으로 공간구축 공사가 지연됨에 따라 원활한 공사수행 및 예산집행을 위해 명시이월을 추진하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

❍ 지방재정법 제50조 및 동법 시행령 58조 (세출예산의 이월)

❍ 서울특별시 강남구 재무회계규칙 제16조(예산의 이월), 제27조(이월예산의 집행)

❍ 로봇플러스사업 추진계획 (뉴디자인과-6210, 2020. 6. 9.)

❍ 2020년도 협업지능기반 로봇플러스 경쟁력지원사업 선정 (2020. 6.25.)

Ⅱ		사 업 개 요

❍ 사업위치 : **************************************

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년

❍ 추진주체 : (주관) 로봇 관련 국책연구기관 등, (참여) 강남구, 서울시

❍ 총사업비 : 853억원 (국비 631억, 시비 75억, 구비 101억, 민자 24억)

❍ 사업내용

구 분	협업지능기반 로봇플러스 경쟁력 지원사업	빅데이터 활용 마이스터 로봇화 기반구축사업	협동로봇 안전인증 및 위험성실증 기반구축사업
사업기간	2020. 6. ~ 2024.12.	2021. 3. ~ 2025.12.	2021. 7. ~ 2025.12.
사 업 비	310억원 (국비 243/시비 25/구비 42)	414억원 (국비 288/시비 25/구비 59)	149억원 (국비 100/시비 25/민자 24)
사업규모	2개동, 지상 2층 연면적 1,451㎡	1개동, 지상 3층 ‧ 지하 1층 연면적 2,640㎡
사업내용	제조공정의 단순 작업 → 국산로봇으로 대체	숙련공의 현장 노하우를 디지털화 ‧ 자동화	협동로봇 안전설계 및 시험인증 체계 구축

Ⅲ		명 시 이 월

❍ 명시이월 예산 : 총 3,867,212천원                          (단위 : 천원)

단위사업	세부사업	편 성 목	예 산 액	이 월 액
강남 뉴디자인 추진	강남 로봇거점지구 조성	일반운영비 (201)	3,348	3,348
		시설비 및 부대비 (401)	4,679,530	3,863,864
계			4,682,878	3,867,212

- 세부내역

계	협업지능기반 로봇플러스 경쟁력 지원사업	빅데이터 활용 마이스터 로봇화 기반구축사업
************	***********	********
******* *********	************************** ****************************** ****************************** ****************************** *************************** *****************************	*****************************
	***************	**************
*** ***********	************************************ ************************************	**************************** **************************** ***************************
	***************	**************

❍ 명시이월 사유

- 협업지능기반 로봇플러스 경쟁력 지원사업 관련, 토양정밀조사 등으로 공간구축 공사가 지연(중지)됨에 따라 회계연도 내 공사 관련 예산집행이 어려워(2022년 상반기 재착공 예정) 명시이월 필요

❍ 향후일정 : 정화검증 이후 공사 재착공

****	⇒	****	⇒	*******	⇒	****	⇒	***
********		************		*****************		************		*********

❍ 예산과목

- 뉴디자인과, 품격 있는 강남 만들기, 강남 뉴디자인 추진, 강남 로봇거점지구 조성, 일반운영비, 사무관리비                        (3,348천원)

- 뉴디자인과, 품격 있는 강남 만들기, 강남 뉴디자인 추진, 강남 로봇거점지구 조성, 시설비 및 부대비, 시설비                  (3,807,404천원)

- 뉴디자인과, 품격 있는 강남 만들기, 강남 뉴디자인 추진, 강남 로봇거점지구 조성, 시설비 및 부대비, 감리비                     (56,460천원)

Ⅳ		행 정 사 항

❍ 예산 명시이월 처리                                 기획예산과.    끝.