투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2021년 도로함몰예방사업-서부 설계변경(제1회) 시행 및 의뢰

1. 도로보수과-9686(‘21.10.13.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 「2021년 도로함몰예방사업-서부」에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회)을 시행하고자 하며, 이에 대해 변경 계약의뢰를 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 도로함몰예방사업-서부

나. 공사기간 : 2021.03.09. ~ 12.31.(변경없음)

다. 총공사비 : ************

- ***********************************************

라. 시 공 자 : ****************

마. 설계변경금액

(단위 : 원)

***	***	***	***	***
****	***********	***********	*************	예산재배정 및 낙찰차액포함
*****	***********	***********	*************
*****	*********	**********	************
*****	**********	***********	***********

바. 변경사유

- 시 동공탐사 용역(4-1구역) 결과, 공동원인조사 및 항구복구 물량 추가 발생으로 인한 변경(당초 35개소 → 변경 87개소)

사. 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 도로함몰예방사업, 시설비 (도급비 : 증 123,399,150원)

붙임 : 1. 설계변경(1회) 검토보고서1부.

2. 설계변경 내역서  1부.

3. 설계변경계약금액 검증확인서 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 예산 재배정 관련 1부.  끝.

							서울특별시 서부도로사업소장
주무관							권은용			도로보수과장					윤옥광					서부도로사업소장					10/15 김영철
협조자				주무관						이이용					주무관							장재영					관리단속과장							박성주
시행			도로보수과-9744									(						)		접수											(						)
우																					/			http://www.seoul.go.kr
전화								/전송								/													/	부분공개(5)