문서번호	정보통신보안담당관-26467
결재일자	2021. 10. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
실무사무관	스마트CCTV팀장	정보통신보안담당관
신경철	권순복	10/15 이철희

「‘21년 지능형 CCTV 고도화사업」

자치구 추진현황 점검결과 보고(3분기)

2021. 10.15.

정보통신보안담당관

(스마트 CCTV팀)

「‘21년 지능형 CCTV 고도화사업」

자치구 추진현황 점검결과 보고(3분기)

시민 안전을 위한 방범용 CCTV 신규설치 및 저화질카메라 교체, 안전환경개선(지능형 선별관제 구축 등)사업에 대한 자치구별 추진실적을 점검하고 보고 드림

1		관련근거

○ 서울시특별시 관리조례 제28조(지방보조사업 수행상황 점검 등)

○「'21년 지능형 CCTV 고도화사업」시 보조금 교부

- 시 보조금 교부 : 1차 지원(’21.5.6일), 2차 지원(‘21.7.16일)

○ '21년 지방보조금 사업(지능형 CCTV 고도화사업) 추진현황 요청

- 정보통신보안당관-22840(’21.9.3)

2		점검개요

○ 사 업 명 : ‘21년 지능형 CCTV 고도화 사업

○ 점검기간 : 2021.9.3. ~ 9.30(작성일자 기준 ’8.31일)

○ 대    상 : 23개 자치구************************

*************************************

**************************************

************************************************

**************************

○ 방    법 : 자치구에서 사업별 자체 점검표 작성 제출

○ 점검내용 : 사업 진행현황, 보조금 집행현황, 사업추진실적 등

3		점검결과

□ 자치구별 세부내역

① 서울시 전 지역 CCTV 설치

○ 점검결과 : 정상추진 20, 지체 2

- 본 사업은 시·구 매칭(5:5)사업으로 市 보조금 배분 기준에 따라 예산을 차등지원(2차 7.16일)하여 자치구별 행정절차(이해관계자 의견수렴 등) 및 공고 등으로 20개구는 ‘21년도, 2개구는  ‘22년에 준공 예정임.

※ ’22년도 준공예정인 서대문구, 금천구는 조기 준공될 수 있도록 독려

○ 세부 추진현황

(단위 : 백만원)

연번	기관명	계약일자	준공 (예정)일	보조금 교부금액	‘21.8.31일기준		최종집행 (예정)액	최종집행 (예정)일
					집행액	집행잔액
계				*********
1	***	21. 9월 예정	‘21. 11월	******	0	******	******	********
2	***	준비중	‘21.12.10.	******	0	******	******	********
3	***	준비중	‘21.12월중.	******	0	******	******	********
4	****	준비중	‘21.12.10.	******	0	******	******	********
5	***			******	자료 미제출로 현장점검 예정
6	***	‘21.10.8예정.	‘21.12.17	******	0	******	******	********
7	***	‘21. 9.	‘21.12월중	*******	0	*******	*******	********
8	***	준비중	‘21.12월중.	*******	0	*******	*******	********
9	****	준비중	‘22.4월중	*******	0	*******	*******	*******
10	***	10.18예정	‘21.12.20	*******	0	*******	*******	********
11	***	준비중	‘21.12월중.	*******	0	*******	*******	********
12	***	‘21.10.15예정	‘21.12.1	*******	0	*******	*******	********
13	***	‘21. 9월중	‘21.12월중	*******	0	*******	*******	********
14	***	’21.06.21(1차)	’21.10.19(1차) ’21.12.31(2차)	*******	0	*******	*******	********
15	***	공고중	‘21.12월중.	*******	0	*******	*******	********
16	****	공고중	‘21.12월중.	*******	0	*******	*******	********
17	***	공고중	‘21.12월중.	*******	0	*******	*******	********
18	**	2021.8.27.	‘21.10.26.	******	0	******	******	*********
19	***	준비중	22년 5월	******	0	******	******	******
20	***	‘21.08.18	‘21.12.30	*******	415,900	*******	*******	*********
21	***	21.6.13.	‘21.10.31.	*******	280,000	*	*******	*********
22	***	‘21.10.4예정	‘21.12.10	*******	0	*******	*******	*********

② 대학가 주변 CCTV 확대

○ 점검결과 : 정상추진

- 서울시 2차 추경(5.20일)으로 추진되는 사업으로 예산확보(추경 등) 자치구에 市 보조금을 지원(2차 7.16일)하여 자치구별 행정절차(이해관계자 의견수렴 등) 및 공고 등 정상 추진중.

○ 세부 추진현황

(단위 : 천원)

연번	기관명	계약일자	준공 (예정)일	보조금 교부금액	‘21.9.20일기준		최종집행 (예정)액	최종집행 (예정)일
					집행액	집행잔액
계				*********		*********	*********
1	***	21. 9월 예정	‘21. 11월	*******	0	*******	*******	**********
2	***	준비중		******	자료 미제출로 현장점검 예정
3	***	준비중	‘21.12월중.	******	0	******	******	**********
4	***	준비중	‘21.12.10.	*******	0	*******	*******	**********
5	***	준비중	‘21.12월중.	*******	0	*******	*******	**********
6	***	‘21.10.8예정.	‘21.12.17	******	0	******	******	**********
7	****	‘21. 9.	‘21.12월중	*******	0	*******	*******	**********
8	***	준비중	‘21.12월중.	******	0	******	******	**********
9	***	10.18예정	‘21.12.20	*******	0	*******	*******	**********
10	***	준비중	‘21.12월중.	*******	0	*******	*******	**********

③ 저화질 카메라 교체

○ 점검결과 : 정상추진

○ 세부 추진현황

(단위 : 백만원)

연번	기관명	계약일자	준공 (예정)일	보조금 교부금액	‘21.8.31일기준		최종집행 (예정)액	최종집행 (예정)일
					집행액	집행잔액
계				*******	******	*******	*******
1	***	‘21.07.16.	‘21.10.09.	*******	*	*******	*******	**********
2	****	‘21.7.26(1차)	‘21.9.7(1차).	*******	*******	******	*******	***********
3	***	’21.06.03.	’21.07.28.	******	******	**	**	**********

④ 안전환경개선(선별관제, CCTV 함체보안)사업

○ 점검결과 : 정상추진

- 본 사업은 시·구 매칭(5:5)사업 추진 됨. 자치구 추경확보(관악 9.15일, 강남 8.5일)에 따라  市 보조금 지원하여 자치구 행정절차(이해관계자 의견수렴 등) 및 공고 등 정상 추진중.

○ 세부 추진현황

(단위 : 천원)

연번	기관명	계약일자	준공 (예정)일	보조금 교부금액	‘21.9.20일기준			최종집행 (예정)액	최종집행 (예정)일
					집행액	집행잔액
계				*********		*********		*********
1	***	준비중		*******	******************
2	****	‘21.8.12.	‘21.12.10.	*******	*******	*		*******	**********
3	***	‘21.6.1	‘21.6.23	*******	*******	*		*******	**********
4	***	‘21.10.25	‘21.12.31	*******	0		*******	*******	‘********

4		향후계획

○ 실적부진 기관 대책 : 관리감독 강화 및 사업추진 독려

- 점검표 미 제출한 서초구는 현장점검 실시 : 10월중(별도통보)

※ 자치구 방문시 준비사항 : 자체 점검표, 사업별 추진 계획서, 설계서 등

○ ’21년도 추진실적 최종 점검(12월중)

- 필요시 현장점검 병행

○ 자치구별 준공감독 및 정산 처리

붙임 : 자치구별 추진실적 1부.  끝.