문서번호	토목부-19148
결재일자	2021. 10. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박희정		代박상철	10/15 임춘근
협조
	주무관		정원범

용역 설계변경(전체4회, 12차 1회)검토보고

【강남순환도시고속도로건설사업 환경보전방안 검토 및 사후환경영향조사용역 】

2021. 10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

용역 설계변경(전체4회, 12차 1회)검토보고

【강남순환도시고속도로건설사업 환경보전방안검토 및 사후환경영향조사용역】

강남순환도시고속도로건설공사(4공구) 운영시 사후환경영향조사용역 추가 시행 반영에 따른 설계변경을 시행코자 검토 보고 드림

1		관련근거

❍ 운영시 사후환경영향조사용역(4공구)시행 (토목부-17185호,2021.9.8.)

❍ 추가과업에 따른 신규단가 협의율 검토보고 (토목부-17795호,2021.9.16.)

2		용역개요

❍ 대    상 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 규    모 : 환경보전방안 및 사후환경영향조사

- 공사시(대기질, 수질, 소음․진동), 운영시(대기질, 수질, 소음)

❍ 용 역 비 : 437,000천 원

❍ 용역기간 : '10. 6. 15. ~ '26. 12. 31.

❍ 용 역 사 : ㈜천일

3		설계변경 내용

❍ 강남순환도시고속도로건설공사(4공구) 운영시 사후환경영향조사용역 시행반영하여 설계변경코자 함.

❍ 설계변경 현황(전체4회)

*******                                                      (단위 : 원)

구 분	금 액		증․감액		비 고
	당 초	변 경
계	***********	***********	증	***********
도 급 비	***********	***********	증	***********

***** 1회                                                     (단위 : 원)

구 분	금 액		증․감액		비 고
	당 초	변 경
계	**********	**********	증	**********
도 급 비	**********	**********	증	**********

❍ 수량 변경현황
*******

구 분 (운영시)	당 초	변 경	증․감		비 고
대기질 측정	60회/월별	140회/월별	증	180회/월별
소 음 측정	20회/반기별	40회/반기별	증	20회/반기별
진 동 측정	0회/반기별	20회/반기별	증	20회/반기별

***** 1회

구 분 (운영시)	당 초	변 경	증․감		비 고
대기질 측정	0회/월별	9회/월별	증	9회/월별
소 음 측정	0회/반기별	2회/반기별	증	2회/반기별
진 동 측정	0회/반기별	2회/반기별	증	2회/반기별

4		조치의견

************************************************************************

붙임 : 1. 운영시 사후환경영향조사용역(4공구) 시행방침 1부.

2. 추가 과업에 따른 신규단가 협의율 검토보고 1부.

2. 설계변경내역서(8공구)-총차4회 1부.

3. 설계변경내역서(8공구)-12차1회 1부.   끝.