“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	조달구매 물품 납품기한 변경 계약의뢰(패널 조달구매)

1. 시설관리과-14814(2021.8.5)호 및 행정지원과-17054(2021.8.10)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 구매의뢰하여 계약한 조달 공급 물품이 배수지 항내 단면보수공사가 지연되어 아래와 같이 납품기한 변경계약 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품요구번호 : **************

나. 계 약 자 : *******

다. 품    명 : 저수탱크

라. 구매규격 : **********************************************

마. 납품기한

구 분	납품기한	비 고
당 초	2021/10/20
변 경	2021/12/31

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비 (22208 배수지 내부방식공사)

붙임:  분할납품요구 및 통지서 송부 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	오영진		시설관리팀장	이승영		시설관리과장	10/15 고신석
협조자
시행	시설관리과-19517	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/
전화	02-3146-4599	/전송	02-3146-4639	/	oyj6802@seoul.go.kr	/	부분공개(7)