문서번호	설비부-14628
결재일자	2021. 10. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		문학준	10/15 김호성
협조

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회) 검토보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(설비부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회) 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』관련, 계약상대자로부터 물가변동으로 의한 계약금액 조정(1회) 요청이 있어 물가변동 금액 적정 여부를 검토 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

○ 지방계약법 제22조(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정)

○ 공사계약 일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 보고[시립CM 제2021-321호('21.10.12.)]

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사

○ 위    치 : 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422.07㎡(청소년수련시설)

○ 계약기간 : *************************

○ 계약금액 : **************

○ 시 공 사 : *****************

○ 건설사업관리단 : *************************

○ 계약현황

계약건명	차수	계약기간	계약금액(원)	비고
****	**	***********************	*************
	**	***********************	**********
	**	***********************	*************

Ⅲ		검토내용

○ 물가변동(ESC)으로 인한 계약금액 조정 충족 요건

- 계약체결일로부터 90일 이상 경과

- 물가변동 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 경우

○ 물가변동(ESC) 조정 조건 충족 여부

구 분	제1회	충족여부	비 고
****	****	**	******
**** *****	***********	**	******
**** *******	***********
****	****
******	*****	**	*****

○ 계약금액 조정(제1회) 세부검토 내용

구 분		금 액	비 고
물가변동 대상금액의 계약금액(A)		**************
물가변동 적용제외 금액(B)		***********
물가변동 조정기준일 현재공정률	예정공정률	******
	실행공정률	******
	기성공정률	******
	제외공정률	******
물가변동 적용대가(C)		**************	C=A-B
물가변동 조정률(D)		*****	지수조정률 산출표 참조
물가변동 등락대상 조정금액(E)		***********	E=C*D
선급금 공제금액(F)		**	선금 지급 없음
물가변동 조정 적용금액		***********

○ 계약금액 조정 금액                                        (단위 : 원)

차 수	계약금액	조정금액	증·감액	비 고
총 차	*************	*************	*************
1 차	**********	*	*
2 차	*************	*************	*************

○ 건설사업관리인 검토의견

- 상기와 같이 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역을 검토한 결과, 물가 변동 조정 경과기간이 기준시점 일로부터 90일 이상(192일) 경과하고,

- 지수조정률이 100분의 3이상(4.65%) 증가 되어 관련 규정에 의거 상기와 같이 물가변동 조정금액으로 정함이 타당하다고 사료됨.

Ⅳ		보고자의견

○『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』관련 건설사업관리기술단의 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회) 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 계약금액 조정 사항을 계약부서(총무부)에 변경 계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 물가변동 관련 계약금액 조정(제1회) 보고 1부.  끝.