문서번호	시설과-4227
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장
김민주	김석광	10/18 권종화
협 조

『2021년 CCTV시스템 유지보수공사(연간단가)』

실정 보고(2차)

2021. 10.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『2021년 CCTV시스템 유지보수공사』

실정 보고(2차)

『2021년 CCTV시스템 유지보수공사』추진과 관련하여 설계도서 검토 및

현장여건 변화 등에 따라 발생한 실정사항을 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2021년 CCTV시스템 유지보수공사

□ 공사기간 : 2021. 2. 16 ~ 2021. 12. 21.

□ 도 급 비 : *********

□ 도 급 자 : ************

Ⅱ		보고내용

□ 주요 실정사항

(단위 : 천원, 제경비 별도)

연번	공종	현황 및 문제점	검토의견	개략 공사비 (증▪감)
1	안내판 설치 외 3종	장충단공원 공원등주 교체에 따른 안내판, 비상벨 철거 및 재설치 필요	신규공종 추가하여 설계변경	*********
2	광케이블 포설 외 3종	설치류에 의한 광케이블 손상으로 복구작업 필요 광케이블 포설 공종추가 등	신규공종 추가하여 설계변경	*********
3	카메라 설치(일반형) 외 3종	낙산공원 CCTV 개선사업 후 재사용 가능한 카메라 중랑캠핑숲으로 이설	물량변경하여 설계변경	*********
4	CCTV용 카메라 구매 외 1종	낙산공원 철거 카메라 사용으로 구매 불요	물량변경하여 설계변경	*********
5	카메라AS 외 15종	현장상황에 따른 작업물량 변경	물량변경하여 설계변경	*********
6	보험료 정산	당초 원가계산서에 계상되어 있는 보험료(건강, 연금, 노인장기요양)는 준공시 실액정산이 필요함	실사용 정산토록하고, 설계변경에 반영	*********

Ⅲ		소요예산

□ 소요예산 내역

(단위 : 천원)

공종	(증▪감)개략 공사비	비고
1. 안내판 설치 외 3종	*********	제경비 포함
2. 광케이블 포설 외 3종	*********
3. 카메라 설치(일반형) 외 3종	*********
4. CCTV용 카메라 구매 외 1종	*********
5. 카메라AS 외 22종	*********
6. 보험료 정산	********
증 감 계	*********

□ 예산과목 : 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비(100-401-01)

Ⅳ		조치계획

□ 시공물량 증가에 따른 공사비 증액분은 본 예산 낙찰차액(2,100천원) 사용하고자 함

□ 상기와 같이 설계도서 검토 및 현장여건 변화 등에 따른 실정을 반영하여 공사추진에 만전을 기하고자 하며, 추후 설계변경 시 정산▪반영코자 함

붙임  : 설계변경내역서 1부.  끝.