문서번호	건축부-16583
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
손남기		차무흥	10/18 신명승
협 조
	주무관			김완선

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

코아부분(E/V 홀 등) 마감재변경 등 검토보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(건  축  부)

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

코아부분(E/V 홀 등) 마감재변경 등 검토보고

『************************************************************

********************************************

1		사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 백범로 21 (舊, 한국산업인력관리공단 )

○ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 12,271㎡

○ 공사기간 : (3차)‘21.01.16. ~ ’21.12.14. (총차:‘19.04.15. ~ ’21.12.14.)

○ 공 사 비: (3차)금9,093,549,000원 (총차:금16,316,549,000원)

○ 시 공 사 : 혁성공영㈜, ㈜태왕이앤씨

○ 감 리 사 : ㈜유탑엔지니어링, ㈜아이티엠코퍼레이션

2		추 진 경 위

○ ‘19. 04. 15. : 공사착공

○ ‘19. 05. 15. : 설계용역 준공

○ ‘19. 08. 06. : 서울창업허브단지 시험동 철거 완료

○ ‘20. 02. 20. : 골조공사 완료

○ ‘21. 10월 현재.  내·외부 마감공사 중

3		실정보고 내용

○ 검토개요

- 코어#1~#벽체 마감재 변경 및 우수드레인 벽체 삭제 등.

○ 관련규정 및 검토근거

가. 관련규정

-「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제97조(설계변경 관리)

나. 검토근거

- 에이텍 2021-56호(21.06.03) 시립마포실버케어센터 건립공사 실무자 회의에 따른 협의 결과 공문 회신

- 에이텍 2021-54호(21.06.04) 시립마포실버케어센터 건립공사 실무자 회의에 따른 협의 결과 공문 회신

- 유마현 제21-025호(2021.06.12)실정 보고 제출 통보의 건

- 혁성실버케어-21-0141호(2021.09.30)실정보고(코어#1~3 마감재 변경 및 지상층 조적벽체 변경)

○ 검토내용

가. 변경내용

*****	*****	*****	*******
**** *******	***** ***	****	***************
	******** *****	****	*********
**** *******	***** ***	****	***************
**** *********	***** ***	****	***************
**** *******	*******	********	************
***** *********	***	***** ********	************
***** ******	*********	****	**********************

******************************************************************

***********		****	****	***	****
****	***	***********	*************	**********
	***	***********	************	***********
	**	**********	***********	*********
	***	***********	************	************
****		***********	************	***********
**********		***********	************	************
****		**********	***********	***********
**********		************	************	*************
******		***********	************	***********
**********		*************	**************	*************

4		건설사업관리자 검토의견

*******************************************************************

*************************************************************

5		설계자 검토의견

*****************************************************

6		처리의견

************************************************************

붙임 : 실정보고 공문(건설사업관리단). 끝.