문서번호	기전과-7288
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
박건우		이재권	10/18 장상규
협조
	주무관		문준호

『금호터널 외 4개소 노후 조명시설 개선공사』

설계변경(정산) 검토 보고

2021. 10.

성동도로사업소

(기 전 과)

『금호터널 외 4개소 노후 조명시설 개선공사』

설계변경(정산) 검토 보고

『금호터널 외 4개소 노후 조명시설 개선공사』시행 중 공사시간 변경 및 물량변동이 있어 아래와 같이 설계변경을 실시하고 준공 처리고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 금호터널 외 4개소 노후 조명시설 개선공사

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 일 : 2021. 7. 16.

○ 착 공 일 : 2021. 7. 27.

○ 준공기한 : 2021. 10. 19.

○ 공사내용 : 방전등 등기구 1100등 철거, LED등기구 988등 설치

○ 계약업체 : **********************

□ 설계변경 내역

○ 설계변경 사유

- 금호터널, 성동지하차도의 공사시간 변경(주간→야간)에 따른 공사비 증액

- 공사 추진과정 중 설치위치 변동에 따른 물량 변경 적용

- 공사원가계산서상의 각종 보험료 감액 정산(증빙서류 미제출)

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 , 감	비 고
도급비	공급가액	***********	***********	*************
	부가가치세	**********	**********	*************
	합 계	***********	***********	*************

○ 주요 변경 내역

연번	내 용	규 격	수량	내 역		비고
				변경전	변경후
1	터널등기구 설치	100W	358개	주간	야간	증
2	터널등기구 철거	200W이하	90개	주간	야간	증
3	터널등기구 철거	250W	332개	주간	야간	증
4	교통정리		변동	- 주간 - 8개소	- 야간 - 6개소	증
5	터널등기구 설치	100W	변동	72개	70개	감2
6	터널등기구 철거	250W	변동	65개	59개	감6

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로시설물 노후 조명시설 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 보고자 의견

○ 변동내역에 의거 설계변경(정산)을 시행하여 준공 처리하고자 함

붙임  1. 설계변경 내역서(갑, 을) 1부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.