문서번호	설비부-14742
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	시책사업과장	설비부장
임재욱	장재순	10/18 김호성

『도봉어르신문화센터 복합시설 건립 통신공사』

관급자재[영상(AV)설비] 추가구매 검토보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『도봉어르신문화센터 복합시설 건립 통신공사』

관급자재[영상(AV)설비] 추가구매 검토보고

『도봉어르신문화센터 복합시설 건립 통신공사』에 소요되는 관급자재[영상(AV)설비] 추가구매 요청에 대하여 검토보고 드림

공사개요

❍ 사 업 명: 도봉어르신문화센터 복합시설 건립 통신공사

❍ 공사위치: 서울특별시 도봉구 창4동 1-1

❍ 공사규모: 지하 2층/지상 5층, 연면적 4,245㎡

❍ 공사기간: 2020.03.06. ~ 2021.10.31.(6~7차)

사업부서 요청사항

❍ 5층 4개실(열린소통실,채움터,디지털실,배움터) 영상설비 추가 설치

품 목	규 격	수 량	요청사유
영상설비	- 비디오프로젝터(5200안시) - 영상용스크린(3mX2.4m) - 영사대(Up/Down,1m) - 플러그잭(4CH),HDMI케이블 네트워크장비 랙(19〃)외 4종	4 SET	******************************************************************************************

검토내용

❍ 추가시공 가능 및 용이성 여부

▸ 추가되는 영상설비 일체는 기 시공된 건축물(구조, 마감 등)과 관계없이  별도 시공이 가능하여 추가 설치에 대한 공간적, 기술적 제약이 없음

❍ 소요예산 확보 여부

▸ 총 사업비 내 사용가능한 잔여 예산이 있으므로 추가 구매 가능함

❍ 보고자 의견 : 추가시공 가능성 및 예산 확보, 기존 설치된 장비와 추가분에 대한 하자처리 및 유지관리 등 종합적으로 고려하면 우리부에서 추가 발주하여 사업의 완성도를 높이는 것이 타당할 것으로 판단됨

구매계획

❍ 구매방법 : 조달구매(다수공급자 계약)

▸ 사 유 : ************************************************************************************

❍ 소요예산 : ****************************

❍ 대상업체 : *********************

향후계획

❍ 2021.10. : 관급자재 발주 및 계약의뢰

❍ 2021.10.31. : 납품 완료

붙 임 : 관급자재 추가구매 요청 공문(건설사업관리단) 1부.  끝.