문서번호	치수과-17525
결재일자	2021.10.18.
공개여부	부분공개
방침번호

★주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장
박철홍		문철		민병기		전결 10/18 최연우
협조
	기전팀장		김종천

★ ◉

2022년 정밀안전진단 및 성능평가용역 추진 계획

2021. 10.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√] ( 시비 재배정 ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2022년 정밀안전진단 및 성능평가용역 추진 계획

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 빗물펌프장 및 수문에 대한 정밀안전진단 및 성능평가 용역을 추진하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 근거

정밀안전진단 실시

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제40조(시설물의 성능평가)

Ⅱ		추진 개요

진단 및 점검 실시 주기

안전등급	정밀안전진단	성능평가
A등급	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상
B∙C등급	5년에 1회 이상
D∙E등급	4년에 1회 이상

대상 시설물

❍ 빗물펌프장(3개소): 뚝섬·송정·행당빗물펌프장

❍ 배수문(2개소): 금호·옥수배수문

Ⅲ		세부 추진계획

정밀안전진단 및 성능평가용역 추진

❍ 총 5건, 사업비 565,480천원(시비)

용 역 명	용역기간	용역비(천원)	비 고
뚝섬빗물펌프장 정밀안전진단용역	2022.3.~2022.12.	162,050	도면복원과업 추가
송정빗물펌프장 정밀안전진단용역	2022.3.~2022.12.	110,030	도면복원과업 추가
행당빗물펌프장 정밀안전진단용역	2022.3.~2022.12.	140,430	도면복원과업 추가
금호배수문 정밀안전진단 및 성능평가용역	2022.3.~2022.12.	81,260	성능평가 및 도면복원과업 추가
옥수배수문 정밀안전진단 및 성능평가용역	2022.3.~2022.12.	71,710	성능평가 및 도면복원과업 추가

Ⅲ		향후 계획

사전절차

❍ 2021. 10. : 기술용역타당성심사 의뢰(市 기술심사담당관)

사업시행

❍ 2022.  3. : 용역 발주 및 착수

※ 단독 또는 통합 발주 시행

❍ 2022.  9. : 區 기술자문회의

❍ 2022. 11. : 市 건설기술심의

❍ 2022. 12. : 용역 완성

붙임  설계내역서 각 1부.  끝.