아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문
		서대문구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경(제2회) 시행[2021년 관내 하수도 준설공사(연간단가)]

우리 구에서 시행 중인 『2021년 관내 하수도 준설공사(연간단가)』의 설계변경(제2회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2021년 관내 하수도 준설공사(연간단가)

2. 공사기간: 2021. 3. 17. ~ 2021. 12. 31.

3. 공사개요: 관내 하수도 준설(V=3,550㎥) 및 하수도 세정(L=25,000m)

4. 도 급 자: 진명환경산업(주) 대표 정옥채

5. 설계변경 사유: 당초 작업물량 소진 및 비 우기기간 하수관 내부 퇴적물 준설요청 관련 민원 작업물량 증가에 따른 설계변경

(※ 단순물량증감에 따른 설계변경심사위원회, 일상감사 제외대상)

6. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
총 공 사 비	999,686,880	1,111,600,000	증	111,913,120
도 급 비	969,686,880	1,111,600,000	증	141,913,120
이 설 비	30,000,000	-	감	30,000,000

7. 예산과목

(단위 : 원)

구분	예산과목	사업예산	도급비			비고
			당초	변경	증ㆍ감
구비	안전치수과, 하수도 및 지하수 관리, 하수관 개량 및 시설물 관리, 하수도 준설, 시설비 및 부대비, 시설비	1,000,000,000	619,686,880	761,600,000	증 141,913,120
시비	물재생계획과, 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비 (공기업하수도사업특별회계)	350,000,000	350,000,000	350,000,000	-
계		1,350,000,000	969,686,880	1,111,600,000	증 141,913,120

붙임 : 1) 낙찰차액 사용계획 검토보고 1부.

2) 설계변경 사유서 1부.

3) 설계변경 내역서 1부.

4) 제비율 검증확인서 1부.

5) 설계변경 심사 결과통보 각 1부.

6) 합의각서 1부.  끝.

주무관							김건우			치수팀장					서재영					안전치수과장					代김종일						안전건설교통국장					함명수
부구청장							10/18 김진만
협조자				주무관						정진희					계약팀장							이향란					재무과장								박춘식
기획재정국장							강환복
시행			안전치수과-20692									(						)		접수													(					)
우	03718					서울특별시 서대문구 연희로 248															/			http://www.sdm.go.kr
전화		02-330-1743						/전송			02-330-8945					/	kimgunoo@sdm.go.kr														/	부분공개(5)