아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문
		서대문구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경(제2회) 시행[2021년 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)]

우리 구에서 시행 중인 『2021년 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)』의 설계변경(제2회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2021년 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)

2. 공사기간: 2021. 3. 19. ~ 2021. 12. 31.

3. 공사개요: 빗물받이 준설(27,750개소) 및 연결관 준설(900개소)

4. 도 급 자: 현덕건설산업(주) 대표 이길수

5. 설계변경 사유: 당초 작업물량 소진 및 비 우기기간 돌발강우 시 가을철 낙엽, 쓰레기 등으로 인한 빗물받이 배수불량 예방을 위한 작업물량 증가에 따른 설계변경

(※ 단순물량증감에 따른 설계변경심사위원회, 일상감사 제외대상)

6. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
총 공 사 비	398,201,000	452,122,000	증	53,921,000
도 급 비	398,201,000	452,122,000	증	53,921,000
이 설 비	-	-		-

7. 예산과목

(단위 : 원)

구분	예산과목	사업예산	도급비			비고
			당초	변경	증ㆍ감
구비	안전치수과, 하수도 및 지하수 관리, 하수관 개량 및 시설물 관리, 빗물받이 및 연결관 준설, 시설비 및 부대비, 시설비	300,000,000	245,201,000	299,122,000	증 53,921,000
시비	물재생계획과, 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비 (공기업하수도사업특별회계)	153,000,000	153,000,000	153,000,000	-
계		453,000,000	398,201,000	452,122,000	증 53,921,000

붙임 : 1) 낙찰차액 사용계획 검토보고 1부.

2) 설계변경 사유서 1부.

3) 설계변경 내역서 1부.

4) 제비율 검증확인서 1부.

5) 설계변경 심사 결과통보 공문 1부.

5) 합의각서 1부.  끝.

주무관							김건우			치수팀장					서재영					안전치수과장					代김종일						안전건설교통국장					10/18 代조봉기
협조자				주무관						정진희					계약팀장							이향란					재무과장								박춘식
기획재정국장							강환복
시행			안전치수과-20674									(						)		접수													(					)
우	03718					서울특별시 서대문구 연희로 248															/			http://www.sdm.go.kr
전화		02-330-1743						/전송			02-330-8945					/	kimgunoo@sdm.go.kr														/	부분공개(5)