문서번호	교통정보과-13469
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운수정보팀장	교통정보과장
지창원		박양규	10/18 이수진
협 조
	주무관			박영실
	주무관			조현진
	주무관			김정현

’21년 9월 운수정보팀 소관 정보시스템

운영·유지관리 용역 사업 월간 보고

2021.  10.

교통정보과

(운수정보팀)

’21년 9월 운수정보팀 소관 정보시스템

운영·유지관리 용역 사업 월간 보고

운수정보팀 소관 정보시스템 운영 및 유지관리 용역 사업의 ’21년 9월 시스템별 월간보고 결과를 보고드림

□ 월간보고(9월) 개요

○ 일자/장소 : ’21.  10. 13.(수) 15:00 ~ 17:50 / 교통지도과 회의실

○ 참  석  자 : 운수정보팀장 및 담당자, 수행업체 등

○ 보고 내용 : 시스템별 ’21년 9월 추진사항 및 10월 계획 등

○ 대상시스템 및 수행업체(4개 업체)

무인단속시스템 운영 및 유지관리(성능개선 사업 포함) :******

□ 자동차관련 정보화시스템 운영 및 유지관리 : *************

□ 교통위반․운수사업관리시스템 운영 및 유지관리 : ******

□ 불법주정차 단속 통합플랫폼 운영 및 유지관리 : **********

	【 주 요 내 용 】
▶ ’21. 9월 운영 및 유지관리 : 정상 추진 - 무인단속시스템, 교통위반 및 운수사업 관리 시스템, 자동차관련(번호판 영치 · 과태료 · 특별사법경찰업무) 시스템 ▶ 노후 전광판 16개소 교체 개선(20년 기술협상안) 진행 관련 현장 실사 진행 ▶ 모바일 전자고지 관련 자치구 의견 수렴 ▶ 무단방치 행정 이미지 관리 기능 오류 패치 ▶ 모바일 전자고지 독촉분 적용(성북구, 서대문구, 관악구) ▶ 교통위반 오라클 쿼리 튜닝 결과 적용 및 테스트 ▶ 운수사업관리시스템 면허 및 법규위반 정보 관리기능 개선 테스트 ▶ 불법주정차 단속 통합 플랫폼 ⟷ 응답소 연계 개발(계속)

□ ’21. 9월 추진사항: 7개 정보시스템, 2개 앱, 2개 홈페이지

□ 무인단속시스템 운영 및 유지관리 : ’21. 9월 정상추진

○ 수행결과 : 무인단속 시스템 정상 운영 중

➀ 노후 전광판 16개소 교체 개선(20년 기술협상안) 진행 관련 현장 실사 진행

➁ 20년 성능개선, 공단 인수검사 확정 일정 체크 및 협의

➂ 불법주정차 수동 단속 운영뷰어 장애 처리 관련 SW 패치 진행

- 주정차통합플랫폼 자료 연계시 “특별구역코드” 처리를 위한 수정 처리 및 오류 패치 진행 완료

➃ 자전거전용차로 이륜차 통행 무인단속 1단계/2단계/3단계 진행

- 내용 : 1단계(현장실사 및 브라켓 제작)/2단계(케이블 포설 및 카메라 설치 공사)/3단계(현장 테스트-딥러닝 1주차) 진행

- 일정 : ‘21.09.08. / ‘21.09.24. / ‘21.09.27. ~ ‘21.10.03.

➄ 21년 추석명절 대비 경부고속도로 버스전용차로 CCTV 특별점검 진행

➅ 20년 성능개선, 공단 인수검사 대비 1차 사전 테스트 진행

➆ 자전거전용차로 이륜차 통행 무인단속시스템 설치 추진 일정 검토

➇ 기타 시설 관련

- 버스1018지점 및 버스1035지점 민원 관련 현장실사 진행(21.9.24.)

- 불법259지점 수전점 변경에 따른 기존 전원선 철거 및 신규 전원선 포설 진행(21.9.25.)

➈ 유지관리 내역

무인단속시스템	9월 장애발생(건)		처리률(%)	누적 장애률(건)		누적 처리률(%)
	발생	처리		발생	처리
합 계	**	**	***	***	***	***
불법주정차	**	**	***	***	***	***
자 전 거	*	*	***	*	*	***
버스전용차로	*	*	***	**	**	***
대중교통	*	*	***	*	*	***

□ 자동차관련 정보화 시스템 운영 유지관리 : ’21. 9월 정상추진

○ 수행결과 : 자동차번호판 영치시스템 · 자동과태료 관리시스템 · 특별사법 경찰업무 관리시스템 정상 운영 중

[자동차번호판 영치시스템]

① 공영주차장 체납차량 영치단속 연계 기능개선

◦ 서울시설공단 개발업체 기존 개발 일정으로 연계 작업 지연

◦ 공영주차장 입출입정보 기능개선 진행 중

구분	전체 공정률(%)
착수	□ 계획 : 10%, 실행 : 10% 완료
분석	□ 계획 : 10%, 실행 : 10% 완료
설계	□ 계획 : 10%, 실행 : 10% 완료
개발	☑ 계획 : 40%, 실행 : 20%, 시스템 연계개발 진행중
테스트	□ 계획 : 20%
검수 및 이행	□ 계획 : 10%
총공정률	50%

- 추진중인 세부 기능개선 항목

구분	분류	세부기능	적용단
1	사용관리	내부 운영자 권한관리	시스템
2	사용관리	단속 사용자 스마트폰 권한	통합앱
3	체납관리	대상차량 입차내역 조회	통합앱
4	체납관리	대사차량 출차내역 검색	통합앱
5	체납관리	실시간 주차장별 차량현황	시스템
6	알림관리	현장단속 통합앱 체납차량 입차/출차 알림	통합앱
7	알림관리	주차장 최단거리 단속자에 적발알림	통합앱
8	단속관리	체납차량 적발 주차장 위치 맵표기	시스템
9	단속관리	주차장별 단속자료 입력	통합앱
10	통계관리	주차장별 체납차량 적발 통계	시스템
11	통계관리	기간별 체납 차량 적발 통계	시스템

② 경찰청 수배차량 DB 연계 관련 회의

- 영치DB ↔ 경찰청 과태료 체납 DB 연계 검토

- 수배차량 정보 연계 → 영치 단속 사전알림서비스 대응 방안

- 연계 및 수사담당자, 스마트CCTV 담당자, 회의 내용 확인

- 현장 합동 단속 강화 방안

- 통합영치앱·간편민원 서비스 활용 방안

* 현장 영치유예기능 추가건 협의 필요

③ 모바일 전자고지 관련 자치구 의견 수렴

- 번호판영치 사전안내장 모바일 전자고지 관련 자치구 의견수렴 진행

- 희망 : 24건, 미희망 : 2건

- 경비 절감, 납부 편의, 과태료 징수율 증가 기대

④ 응용유지관리 내역

- 번호판 영치업무 관련 행정처리

․ 체납, 수납, 영치 기준 통계자료 생성

․ 9월 체납자동차 번호판영치 징수촉탁 수수료 정산 공문 발송

․ 4분기 사전안내서 발송정보 확인 공문 발송

․ 운행정지 차량 자료 업로드 (9.30. 기준)

⑤ 기타 지시사항

- 간편민원 서비스 지시사항 처리 : 웹 취약점 점검

- 대가청구 산출물 및 자료준비

- 데이터 품질관리 관련 지원처리

※ 유지관리 내역

세부 내용	단계	금월 진척률(건)		금월 달성률(%)	누적 진척률(건)		누적 달성률(%)
		접수	처리		접수	처리
전체 진척도		**	**	***	***	***	***
유지 관리	단순문의	**	**	***	***	***	***
	유지보수	**	**	***	**	**	***

[자동차과태료시스템]

① 부과 완료된 건 삭제 시 경고 메시지 출력

② 엑셀 저장 시 셀 서식 변경

③ 유지보수 처리

- 데이터 조회 관련 문의

- 자료보정 처리 및 프로그램 기능 설명

- 기타 문의사항 처리 및 답변

※ 유지관리 내역

세부 내용	단계	금월 진척률(건)		금월 달성률(%)	누적 진척률(건)		누적 달성률(%)
		접수	처리		접수	처리
전체 진척도		**	**	***	***	***	***
유지 관리	단순문의	**	**	***	***	***	***
	유지보수	*	*	***	***	***	***

[특별사법경찰업무 관리시스템]

① 무단방치 행정 이미지 관리 기능 오류 패치

② 유지보수 처리

- 자료보정 처리 및 프로그램 기능 설명

- 국토부 자료 입력 / 통계 관련 문의

- 기타 문의사항 처리 및 답변

※ 유지관리 내역

세부 내용	단계	금월 진척률(건)		금월 달성률(%)	누적 진척률(건)		누적 달성률(%)
		접수	처리		접수	처리
전체 진척도		**	**	***	***	***	***
유지 관리	단순문의	**	**	***	**	**	***
	유지보수	**	**	***	***	***	***

□ 교통위반/운수사업관리 시스템 유지관리 : ’21. 9월 정상추진

○ 점검결과 : 교통위반 관리시스템 및 운수사업 관리시스템 정상 운영 중

[교통위반관리시스템]

① 오라클 쿼리 튜닝 결과 적용 및 테스트(상위항목 진단)

② 면허 및 법규위반 정보 관리기능 개선(업무담당자 자료 수정 및 삭제 가능) 설계에 따른 개발

③ 모바일 전자고지 독촉분 적용(성북구, 서대문구, 관악구)

④ 사용자 질의응답 응대 등 기타 유지보수 처리

※ 유지관리 내역

세부내용	단계	9월 진척률(건)		9월 달성률(%)	누적 진척률(건)		누적 달성률(%)
		접수	처리		접수	처리
전체 진척도		***	***	****	*****	*****	****
유지관리	사용설명	***	***	****	*****	*****	****
	기술지원	**	**	****	***	***	****
	자료추출	*	*	***	**	**	*****
	통계추출	*	*	**	*	*	****
	오류수정	*	*	***	*	*	***
	기능추가	*	*	*	**	**	****
	기타	*	*	*****	*	*	*****

[운수사업관리시스템]

① FAQ 기능 추가

② 면허 및 법규위반 정보 관리기능 개선

③ ’21. 3분기 화물유가보조금 관련 차량 제원 갱신 작업 등 조정

④ 사용자 질의응답 응대 등 기타 유지보수 처리

※ 유지관리 내역

세부내용	단계	금월 진척률(건)		금월 달성률(%)	누적 진척률(건)		누적 달성률(%)
		접수	처리		접수	처리
전체 진척도		**	**	***	***	***	***
유지관리	사용설명	**	**	***	***	***	***
	기술지원	*	*	***	*	*	***
	자료추출	*	*	***	*	*	***
	통계추출	*	*	***	*	*	***
	오류수정	*	*	***	*	*	***
	기능추가	*	*	***	*	*	***
	기타	**	**	***	***	***	***

□ 불법주정차 통합 플랫폼 운영 : ’21. 9월 정상추진

① 응답소 진행사항

- 불법주정차 통합플랫폼 ⇔ 응답소(현장민원) 연계 테스트

기  간 : 2021. 9. 13. ~ 10. 12.

(당초 :2021. 9. 13. ~ 10. 3.)

- 불법주정차 통합플랫폼 ⇔ 응답소 민원데이터 자체 연계 테스트
· 6개 시범구 민원처리 연계 테스트

· 테스트 시나리오에 의한 테스트 실시(7개 유형 28개 항목)

- 6개 자치구 시범운영

· 기  간 : 2021. 10. 13. ~ 10. 25.

(당초 : 2021. 9. 27. ~ 10. 3.)

· 대상 자치구 : 중구, 성북, 강북, 마포, 강서, 동작

· 불법주정차 통합플랫폼 ⇔ 응답소 민원데이터 연계 시범운영

② 자치구 참여 현황/계획 업데이트

③ 단속앱 업그레이드 검토

④ 자치구 개인정보 위수탁계약 지속추진 (2개 구)

- 강남구, 서초구 : 12월 추진 예정

⑤ 카텍스 사이트 지속적인 모니터링 실시 (계속)

⑥ 모바일 전장정부지원센터(MDM) 기술 동향 파악 (계속)

□ ’21. 10월 추진계획

○ 과업내용 : 총 13개

시스템	과 업 내 용
무인단속 (4)	***********************************
	**********************************
	******************************************
	*******************************

시스템		과 업 내 용
자동차 (5)	공통 (3)	******************
		******************* **********************************************************
		****************
	영치 (1)	*************************
	과태료 (1)	********************************
교통위반 (3)		**************************** ****************************
		***************************
		*********************
운수사업 (1)		***********************

□ 행정사항

○ 기성부분 준공처리

○ 월간보고 시 쟁점사항에 대해 수행업체와 협의하여 후속 조치

○ 차세대 세외수입시스템 구축 관련 협의 등

붙임 1.  ’21. 9월 시스템별 월간 보고자료 각 1부.                     2.  ’21. 9월 시스템별 운영 유지관리 실적 1부.  끝.