투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사 준공기한 연기의뢰

1. 기전과-5154호(2021.10.15.) 준공기한연기 검토보고 관련입니다.

2. 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2021.6.15. ~ 2021.11.11.

다. 계약업체 : 해솔이엔씨(주) 대표 허지훈

라. 계약금액 : 272,647,510원

마. 준공기한 연기내용 : 2021년 11월 11일에서 2021년 12월 10일까지 연기

바. 준공기한 연기사유 : 추가 업무지시(영등포구청 도로과에서 통합주 추가 설치 요청)에        따른 공사기간 부족으로 준공기한 연기

사. 준공기한 연기사유 귀책소재 : 강서도로사업소

아. 지체상금 부과여부(부과, 미부과) : 미부과

붙임  1. 준공기한 연기보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	서승완		강서도로사업소장	10/18 代박종윤
협조자
시행	기전과-5234	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개