문서번호	설비부-14767
결재일자	2021. 10. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		문학준	10/19 김호성
협조

『율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 정보통신공사』

준공기한 연장 검토 보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(설비부)

『율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 정보통신공사』

준공기한 연장 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 정보통신공사』 준공기한 연장에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

○ *******************************

○ *********************************************

○ *******************************************

○ *****************************

○ ****

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
******	*****	**	***********************	**********

Ⅱ		관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 (제8절 2.계약기간의 연장)

○ 정보통신공사 준공기한 연장 검토 보고 [율곡감 제2021-324호 ('21.10.18.)]

Ⅲ		검토내용

○ 준공기한 연기

계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약건명	차수	계약금액(원)	준공(납품)기한
					당초	변경(연장)
**************	*****	******	**	**********	***********	***********

○ 변경사유 : 선행공정(토목) 준공기한 연장에 따른 후속공정 준공기한 연장

○ 건설사업관리인 검토의견

- 선행 공종(토목) 준공기한 연장으로 후속 공정 정보통신공사 준공기한 연장이 적정하다고 사료됨.

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 정보통신공사 준공기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경 계약 의뢰 하고자 함.

붙임 : 1. 건설사업관리단 공문 1부.

2. 토목부 준공기한 연장 방침 1부.  끝.