문서번호	교량안전과-15764
결재일자	2021. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기술점검팀장	교량안전과장
신익현	위성환	10/19 조현석
협 조

- 2021년 마포대교 보수공사 -

실정보고 및 준공기한 연기 검토보고

2021. 10.

안전총괄실

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 2021년 마포대교 보수공사 -

실정보고 및 준공기한 연기 검토보고

마포대교 보수공사의 시행중 확인된 바닥판 열화 및 방수층 손상 등 현장여건을 반영한 조정사항에 대한 실정보고 사항을 검토하여 보고 드림.

※ 관련근거 : 한강교량감 2021-580호(2021.10.14.)

Ⅰ		사업 개요

○ 사 업 명 : 2021년 마포대교 보수공사

○ 규    모 : 절삭후 아스팔트 덧씌우기 158.67a

○ 사업기간 : ’21.05.10. ~ ’21.11.05

○ 총공사비 : 1,983,100천원

○ 시 공 사 : ㈜대한하이텍건설

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단(한강교량건설사업관리단)

Ⅱ		추진 경과

○ ’21.04.03. : 공사발주

○ ’21.05.10. : 공사계약 및 착공

○ ’21.05. ~ 11. : 158.67a중 137.03a 완료 (잔여 21.64a)

Ⅲ		사업비 현황

(단위 : 천원)

구 분	총 사 업 비	도 급 비	관 급 비	이 전 비
금 액	1,983,000	1,258,040	400,038	131,062

Ⅳ		건설사업관리단 실정보고

□ 보고내용

○ 관련근거

- 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 공사계약일반조건 제 6절(공사설계변경)

- 건설공사 사업관리 방식 검토기준 및 업무수행지침 제 97조(설계변경 관리)

- 공사계약일반조건 제 19조 (설계변경 등) 및 19조 5항

○ 실정보고

1. 보도구간 방수층 손상 및 상판열화 보수 등에 따른 물량 증가

- 보도부(포장) 구간의(WP6∼WP14) 포장면 절삭 결과 기존 방수층이 손상되어 슬래브 열화와 재료분리가 발생하고 평삭후 잔여 포장면 층분리*********************************

- 변경내용

※ 당 초 : 보도부 절삭후 아스팔트 덧씌우기 42.12a

변 경 : ******************************************

- 손상현황

구 분	현 황
평면도	*
현 장 사 진	*	*************************************

2. 추가공종 반영에 따른 절대공기 부족

- 요청사유

․ 상판 단면보수 및 방수층 보수, 신축이음장치 덮개보수 등 추가공종 시행에 따른 절대공기 부족 및 물량증가

구 분	추 가 공 종	소요기간(일)	계
소요기간 산 정	**********************	*	***
	***********	*
	***************	*
	***************************	*
	****************************	*
	*******************	*

- ***************************************************

□ 건설사업관리단 조치계획(의견)

○ 보도부(하행) 기존 포장체 절삭 후 확인된 슬래브 상판 손상구간 보수를 위한 추가 공종(단면보수, 교면방수)을 반영하여 시설물의 추가 손상을 방지하고 사업구간 조정이 필요하며,

○ 추가 공종 반영에 따른 절대공기 부족으로 공사 기간을 확보하고자 시공사의 실정보고 사항을 검토한 결과 적정하다고 판단되어 변경사항에 대하여는 승인 조치후 추후 설계변경시 반영하여 정산토록 조치하고자 함.

Ⅴ		검 토 의 견

○ 건설사업관리단의 검토 의견과 같이 작업시 확인된 손상에 대하여 금회 보수공사시 보수하여 시설물의 추가 손상 방지와 안전성을 확보 하고자 추가 공종을 반영하고 추가 공종 반영에 따른 준공기한 연기하는 건설사업관리단의 의견이 적정한 것으로 판단됨.

Ⅵ		조치 계획

○ 책임건설사업관리기술자의 의견이 적정한 것으로 판단되어 승인통보 하고 추후 설계변경시 정산하여 반영토록 조치하고자 함

- 승인내용

․ 추가공종 반영 : 단면보수 및 교면방수, 신축이음부 보호덮개 설치

․ 변경내용 정산 : 추후 설계 변경시 정산 반영

- 증감현황

(단위 : 천원)

*********	***********			******
	*****	*****	**********
*********	*********	*********	*******	*************** ***************** ***************** *********** ************ *************
*******	***********	***********	*
*********	**********	**********	*
****	*********	*********	*******

○ 준공기한 연기

․ 연기사유 : 보도 정비물량 증가 등에 따른 절대공기 부족

․ 사업기간 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
기 간	’21. 5. 10 ~ ’21. 11. 5	’21. 5. 10 ~ ’21. 12. 5	30일

․ 지체상금 : 미부과

붙임 : 건설사업관리단 검토의견 및 관련공문 각 1부.  끝.