문서번호	기전과-7323
결재일자	2021. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
정희준		이재권	10/19 장상규
협조
	주무관		김학민

『2021년 교통안전표지 유지보수공사(연)』

낙찰차액 및 추가배정액 사용계획 보고

2021. 10.

성동도로사업소

(기전과)

	『2021년 교통안전표지 유지보수공사(연)』 낙찰차액 및 추가배정액 사용계획 보고

교통안전표지 규제처리 및 유지보수 등을 위한 공사비 부족이 예상되어 낙찰차액 및 추가 재배정액을 활용하여 공사에 만전을 기하고자 합니다.

공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

○ 시 공 사 : *************

○ 감 리 원 : *************

○ 계약기간 : 2021. 03. 02. ∼ 2021. 12. 20.

○ 계약금액 : ***************************

- 작업지시금액 : *************************

예산현황

○ 예산 현황

(단위 : 원)

재배정액	발주금액	계약금액	낙찰차액	추가 재배정
**********	********** *************	**********	**********	**********

- 낙찰차액 + 추가 재배정 = ***************************

보고내용

○ 예상 작업지시물량 변경에 따른 낙찰차액 및 재배정액 사용

- 변경사유 : 향후 교통안전표지 규제처리 및 유지보수 등을 위한 예상 작업물량 변경으로 공사비 부족이 예상되기에 낙찰차액 및 재배정액을 사용하여 공사비를 확보하고자 함.

- 변경물량(예정)

	표지판 신설, 교체 및 철거	T형 부착대 신설, 교체 및 철거	교차로대 신설, 교체 및 철거	기타 신설, 교체 및 철거	합 계
당초물량	***	**	*	**	***
변경물량	***	***	**	**	***
증 감	**	***	**	**	***

- 예산 사용금액(증액)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증/감액
도급비	**********	***********	**********
이전비	*******	*******	*

추진계획

○ 상기 보고내용과 같이 교통안전표지 예상 공정물량 변경에 따른 예산이 부족하여 본 공사 낙찰차액 및 재배정액*************을 사용코자 하며 설계변경(증액) 시행 후 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 2021년 교통안전표지 관련 예산(시설비) 배정 알림 공문 1부.  끝.