코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(2021년 마포대교 보수공사)

우리 시에서 시행중인「2021년 마포대교 보수공사」의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 공 사 명 : 2021년 마포대교 보수공사

- 계약기간 : 2021.05.10. ~ 2021.11.05.

- 도 급 액 : 금1,258,040,000원

- 도 급 사 : ㈜대한하이텍건설 (계약번호 **************)

나. 연기사유 : 사용안전성 확보를 위한 추가공종 시행에 따른 절대공기 부족

다. 연기내용  당초) 2021.05.10. ~ 2021.11.05.

****************************.

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 변경합의각서 1부.

3. 준공기한 연기 검토보고서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	신익현		기술점검팀장	위성환		교량안전과장	10/19 조현석
협조자	계약총괄팀장	임영미
시행	교량안전과-15838	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울특별시청 본관 8층(교량안전과)	/
전화	02-2133-1978	/전송	02-2133-1429	/	caram00@seoul.go.kr	/	부분공개(5)