투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰〔2021년 가리봉철도고가 진출입 토공부 옹벽 2개소 정밀안전점검용역〕

1. 도로보수과-5325(2021.10.19.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행 중인 “2021년 가리봉철도고가 진출입 토공부 2개소 정밀안전점검용역”를 아래와 같이 준공기한 연기를 요청합니다.

가. 용 역 명: 2021년 가리봉철도고가 진출입 토공부 옹벽 2개소 정밀안전점검 용역

나. 용역기간: 2021. 05. 24. ~ 2021. 10. 20.

다. 용 역 비: ************************

라. 용 역 사 :*************

마. 용역기간 연장 : 총 20일 연장

-당초: 2021. 05. 24. ~ 2021. 10. 21.(150일)

-변경: 2021. 05. 24. ~ 2021. 11. 10.(170일)

사. 준공연기 사유 : 여름철 우기 및 추가작업 지시 보완

아. 준공기한 연기에 따른 귀책 소재: 해당없음

붙임 : 1. 합의각서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 방침서 1부.   끝.

							도로보수과장
주무관							임정묵			도로보수과장					10/19 한정환
협조자
시행			도로보수과-5343									(						)		접수											(						)
우	07520					강서구 양천로 237(마곡동67-1) 강서도로사업소 도로보수과															/
전화		02-2657-7954						/전송			02-2657-7960					/	ijm90@seoul.go.kr												/	부분공개(5)