문서번호	급수운영과-20314
결재일자	2021. 10. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
홍은철	정헌석	성기선	10/20 박기용
협 조

설계변경 보고서 제출에 따른 검토보고

[신월동 606번지 외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사(제2회,최종)]

2021. 10.

강서수도사업소

(급수운영과)

신월동 606번지 외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사」

설계변경[제2회(최종) 보고서 제출에 따른 검토보고

「신월동 606번지 외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여서울시설공단으로부터 설계변경 검토보고서가 제출되어 아래와 같이 검토 후 결과를 보고 드림

※관련대호 서울시설공단 공사감독2처-13200(2021.10.15.)호

□ 공사개요

*****************************************

******************************

********************************

****************************

***********************

****************************

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 제22조 및 동법 시행령 [제74조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)]

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정자치부 예규 제67호(2016.10.4.)

[제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정]

□ 공단 설계변경 심의 현황

구 분	심의 요청사유	심사 일자	주요 심사내용(요약)	비고
공단 자체 심의	신 규 공 종 및 수량 산출 적정성 심의	2021. 10.7. (목)	-*********************** ********** ***********************

□ 공단 보고내용

1) 설계변경 시행근거

- 공사실정 보고(공사현장 상태와 설계서 상이로 인한 변경)

연번	구 분	주요 변경내용	관 련 근 거
1	1차 실정보고	******* ****************	******************* *************
2	2차 실정보고	********	******************* *************
3	3차 실정보고	************** *********** *************************** ************	******************* *************
4	4차 실정보고	**************** ***********	******************* *************
5	5차 실정보고	************	******************** *************
6	6차 실정보고	*********** ********************** ************ ************** *********** ***********	******************** *************
7	7차 실정보고	**********	******************** *************

- 제경비 등 실 사용액 정산에 의한 변경

연번	구 분	주요 변경내용	비고
1	4대 보험료 정산 등	****************************** ****************************
2	산업안전보건관리비 및 환경보전비 정산	******************************* ************** ****************

2) 주요 변경 내용

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증, 감	비고
배급수관 부설	D200~500mm	m	***	***	********
각종변류설치	제수밸브실 설치	개소	***	***	********

3) 설계변경으로 인한 계약금액 조정

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	*******	***********	***********	****************
	*****	**********	**********	****************
	*	***********	***********	****************

□ 조치의견

상기와 설계변경 건에 대하여 실정 보고 및 변경내역서 검토 결과 현장 여건에 따른 물량 증감 및 도급액 변경이 타당하다고 판단되어 서울시설공단 의견대로 설계변경 하고자 함

□ 행정사항

○ 사업소 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경 추진

○ 설계변경 내용 서울시설공단에 통보

○ 준공검사원 접수 후 정산처리

붙임  1. 공단 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 등 관련서류 각 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.