투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	2021년 동물원둘레길 산책로 조성공사 관급자재(U형측구) 남품기한 연기 요청

1. 조경과-5167(201.8.5.)호 및 총무과-8248(2021.9.3.)호와 관련입니다.

2. 2021년 동물원둘레길 산책로 조성공사 관급자재(U형측구) 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 건    명 : 2021년 동물원둘레길 산책로 조성 관급자재 조달구매- U형측구

○ 변경내용 : 납품기한 연기

- 납품기한 : 당초) 2021.9. 30⇒ 변경) 2021. 10. 20

- 연기사유 : *********

○ 계약내용

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위	단가	수량	금액	비고
********	****	************	*	******	***	**********

○ 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리강화, 산림내 이용시설 정비 및 관리, 시설비.  끝.

	조경과장
주무관	최은정		조경과장	10/20 代안봉환
협조자
시행	조경과-6914	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동, 서울대공원)	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7540	/전송	02-500-7993	/	pinus@seoul.go.kr	/	부분공개(5)