투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사(기계,전기,통신)

우리 본부에서 시행중인『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사(기계,전기,통신)』를 아래와 같이 변경 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사(기계,전기,통신)

2. 변경내용(계약금액 변경없음)

공사명	차수	계약금액 [단위:천원]	준공기한
			변경전	변경후
마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기계설비공사	총차	*********	**********	**********
	2차	*********	**********	**********
	3차	*********	**********	**********
마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 전기공사	총차	*********	**********	**********
	3차	*********	**********	**********
마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 통신공사	총차	*********	**********	**********
	3차	*******	**********	**********

4. 변경사유 : 선행공정 지연에 따른 준공기한 연기

5. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 방침서 1부.
2. 건설사업관리단 검토의견서 1부.
3. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박성수		열빛총괄과장	장병선		설비부장	10/20 김호성
협조자
시행	설비부-14869	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)