문서번호	정수시설과-2684
결재일자	2021. 10. 20.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
윤기영		10/20 김기윤
협 조

토목·건축 시설물 정비계획 및 작업지시(7차)

2021. 10.

구의아리수정수센터

토목‧건축 시설물 정비계획 및 작업지시(7차)

정수센터 토목‧건축 시설물 중 노후 등으로 인한 보수‧정비 및 환경개선이 필요한 시설물에 대하여 다음과 같이 작업지시하여 조치하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 구의아리수정수센터 토목‧건축 시설물 정비공사

○ 계약금액 : 133,000,420원

○ 공사기간 : 2021. 4. 6. ~ 2022. 3.31.

○ 도 급 자 : ㈜부루건설 대표 노홍식

□ 보고내용

○ 점검자 : 이용성, 이희점, 윤기영

○ 현황 및 조치의견

연번	위 치	점검 결과 및 현황	조치 의견	비고
1		2021.10.20.한강유역환경청 점검시 1정수장 여과지동 환기창 방충망으로 막도록 지시함.	· 1정수장 여과지동 환기창 방충망 설치 : 12개소, 15㎡
2		1정수장 여과지 사다리 부분 안전시설 설치 요함	· 1정수장 여과지 사다리 부분 출입 안전시설 설치 : 24m
3		1정수장 여과지 제어판넬 및 펌프 보호캐비넷 녹제거 및 도색작업 요함.	· 1정수장 여과지 제어판넬 및 펌프 보호 캐비넷 녹제거 및 도색 : 120㎡
4		활성탄지 출입구 소방법에 의거 바깥쪽으로 열리도록 정비요함.	· 활성탄지 출입구 문개폐 방향 변환 : 1개소

연번	위 치	점검 결과 및 현황	조치 의견	비고
5		1정수장 여과지 방충망 찢어진 곳 방충망 교체 요함.	· 1정수장 여과지 방충망 찢어진 곳 교체 : 16㎡
6		2정수장 여과지 배수로 물고임 현상으로 수평 몰탈 구배 맞추기 요함.	· 2정수장 여과지 배수로 수평 몰탈 구배 맞추기 : 0.6㎡
7		활성탄지 공동구 프레임 녹제거 및 도장 요함.	· 활성탄지 공동구 프레임 녹제거 및 도장 : 4㎡
8		1정수장 여과지 벽체 녹자국 및 노후되어 도색 요함	· 1정수장 여과지 벽체 도색 : 120㎡
9		2정수장 약품동 창호 1개소 방충망이 없어 설치요함	· 2정수장 약품동 창호 방충망 설치 : 1㎡

○ 소요예산：금20,000,000원（상수도사업비,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비）

○ 작업기간：2021.10.20. ~ 2021.11.30.

□ 행정사항

○ 상기 사항에 대하여 『2021년 구의아리수정수센터 토목‧건축 시설물 정비공사』 업체에 지시하여 정비 시행하도록 하고,

○ 신규공종 및 물량증감에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함

붙임 : 작업지시서 1부.  끝.