코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(광운대역세권 공공기여부지 활용 기본계획 수립 용역)

1. 공공개발기획단-8638호(2021.10.19.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인 「광운대역세권 공공기여부지 활용 기본계획 수립용역」 의 계약기간을 아래와 같이 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 용 역 명 : 광운대역세권 공공기여부지 활용 기본계획 수립용역

○ 계약금액 : 금187,170,000원(금일억팔천칠백일십칠만원정)

○ 계약업체 : 주식회사 건축사사무소예지학(대표 김진홍)

○ 변경사항 : 준공기한 연장(기타사항 변경 없음)

당 초	변 경	비고
`20.10.29. ~ `21.10.28.	`20.10.29. ~ `21.12.31.

○ 변경사유 : 붙임 의뢰서 참고

붙임 1. 준공기한 연기 계획서 1부.

2. 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	공공개발기획단장
주무관	박학균		사전협상팀장	오승제		공공개발추진반장	10/20 양병현
협조자	계약1팀장	원종순
시행	공공개발기획단-8708	(		)	접수		(		)
우	04524	서울시 중구 세종대로 110 서울시청 신청사 9층	/
전화	02-2133-8361	/전송	02-2133-0737	/	chobab73@seoul.go.kr	/	부분공개(5)