문서번호	도로계획과-13646
결재일자	2021. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	도로공간계획팀장	도로계획과장	안전총괄관		안전총괄실장
조중환	시희식	권완택	박진순		10/20 한제현
협 조

「동부간선도로 분당·수서방면 진입로 개선」

타당성조사 및 기본계획 용역 추진계획 보고

2021. 10.

안전총괄실

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「동부간선도로 분당·수서방면 진입로 개선」

타당성조사 및 기본계획 용역 추진계획 보고

올림픽대로 등의 만성적 지정체 해소를 위해 동부간선도로 분당·수서방면 진입로 개선을 위한 타당성조사 및 기본계획 용역을 추진코자 함

□ 현황 및 문제점

○ 동부간선도로 분당·수서방면 연결로 용량부족(1차로) 및 합류부 본선차로 축소(3→2차로)로 인해 올림픽대로(하남방면) 지정체 발생

- 대기행렬 및 차량 엇갈림에 따른 올림픽대로(하남방면) 지·정체 심화

○ 동부간선도로 분당·수서방면 연결로 합류부 본선차로 축소(3→2차로)에 따른 청담대교 본선 지·정체 발생

□ 개선방안

○ 동부간선도로 분당·수서방면 연결로(1→2차로)및 본선(3→4차로) 용량 확대를 검토하였으며,

○ 분석 결과 올림픽대로(하남방면) 및 동부간선도로(수서방면) 통행속도 개선효과가 있어 타당성조사 및 기본계획 용역을 시행코자 함

구 분	현 재	사업 미시행 (2035년 기준)	연결로 및 본선 용량 확대
A. 올림픽대로 하남방면 (영동~청담대교 남단)	26.9km/h	24.3km/h(감 2.6)	49.6km/h(증 22.7)
B.동부간선도로 수서방면 (청담대교 본선)	30.2km/h	31.1km/h(증 0.9)	50.5km/h(증 20.3)
C.동부간선도로 수서방면 (탄천2고가 본선)	51.4km/h	51.5km/h(증 0.1)	50.7km/h(감 0.7)

□ 용역 추진계획

○ 용역개요

- 용 역 명 : 동부간선도로 분당·수서방면 진입로 개선 타당성조사 및 기본계획

- 위    치 : 동부간선도로 청담도로공원~탄천1교 교차로

- 내    용 : 동부간선도로 분당·수서방면 진입로 및 본선 확장

· 진입로 확장 1→2차로(276m), 동부간선 본선(탄천2고가교) 확장 3→4차로(2,690m)

- 용역기간 : 2022. 3. ~ 12. (계약일로부터 10개월)

- 용 역 비 : 250백만원

○ 과업수행내용

- 관련계획 조사·검토, 교통영향분석 및 평가, 노선 및 구조물 설계

- 투자 및 편익비용 추정, 경제성 분석, 정책적 분석, 종합평가

- 건설공사 기본계획(기본방향, 공사시행계획, 재원조달, 투자 우선순위 등) 수립

□ 향후일정

○ '21.10.      : 기술용역 타당성심사 의뢰

○ '22. 3.~12. : 용역 시행

붙  임 : 설계내역서 1부.  끝.