투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	도림천4복개 외 3개소 정밀안전점검외 1 준공기한 연기 의뢰

1. 우리사업소에서 시행중에 있는「도림천4복개 정밀안전점검용역」 및 「노들남고가 외 5개소 정밀안전점검용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한(용역기간) 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

용 역 명	용역기간	용역비(천원)	도 급 자	비 고
도림천4복개 외 3개소 정밀안전점검용역	2021. 4. 1. ∼ 10.27	103,620	백양엔지니어링(주)
노들남고가 외 5개소 정밀안전점검용역	2021. 4. 1. ∼ 10.27	119,150	백양엔지니어링(주)

나. 준공기간 변경내용

- 당 초 : 2021. 4. 1. ~ 2021.10.27.

- 변 경 : 2021. 4. 1. ~ 2021.11.30.

다. 준공기간 연기 사유 : 자문위원 의견사항에 따른 현장재조사 및 추가과업

붙임 : 준공기한 연기의뢰 서류 각 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	지종삼		시설보수과장	10/21 김준섭
협조자
시행	시설보수과-7896	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-836-3093	/		/	부분공개(5)