문서번호	건축부-16841
결재일자	2021. 10. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
고병준		차무흥	10/21 신명승
협조
	주무관		손남기

광역소공인 특화지원센터 건립공사

(장기 2차) 선금 신청 검토보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(건 축 부)

광역소공인 특화지원센터 건립공사

(장기 2차) 선금 신청 검토보고

‘지방자치단체 입찰 및 계약집행기준’에 따라 건설사업관리단으로부터 제출된 2차공사 선금신청 건에 대하여 검토보고 드림

******************

1		공사개요

○ 공 사 명: 광역소공인 특화지원센터 건립공사

○ 위    치: 성동구 아차산로17길 9(성수동2가)

○ 규    모: 지하2층/지상7층, 연면적 2,711.05㎡

○ 용    도: 공장, 업무시설, 제1종근린생활시설

*********************************************

*****************************************************

2		추진경위

○ ‘20. 06. 30.: 공사 착수

○ ‘20. 07. 31.: 지상 지장물(기존건물) 철거

○ ‘20. 11. 20.: CIP 천공 완료

○ ‘21. 03. 26.: 토공사 및 흙막이설치 완료

○ ‘21. 09. 06.: 1차수 공사 완료

○ ‘21. 10. 현재.: 1층 철근콘크리트공사 중

3		계약변경 내용

□ 관련근거

○ 광역소공인 특화지원센터 건립공사(장기2차)의 선금 지급 청구(세이브건설   (주), 2021-10-13-02호)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제6장 선금·대가 지급요령 제2절 선금의 지급

□ 검토내용

○ 검토기준: 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제114호)제6장 선금·대가 지급요령 제2절 선금의 지급 2.선금 지급대상 2)지급범위 가), 나)항 적용

- 계약금액의 70%를 초과하지 않는 범위에서 선금의무지급율(계약금액의         40%)이상 지급하되 계약상대자가 선금의무 지급율 이하로 신청하는           경우 신청금액만 지급

- [공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제]: 계약금액에서 직접노무비를          제외한 금액을 기준으로 함.

○ 선금 신청내용 검토

- 계약명: 광역소공인 특화지원센터 건립공사(장기 2차: 2021.9.7 ~ 2022.6.30.)

***	*******	********	********	******	***
********	*************	***********	***********	*****	**
********	***********	***********	***********	*****	**
********	***********	***********	**********	*****	**
**	*************	*************	***********	*****	*

- 2차수 계약금액 및 선금신청율 검토

**************************************************

4		감리자 검토의견

****************************************************

5		처리의견

****************************************************************

붙 임: 장기 2차 선금 지급 청구 검토 1부.  끝.